문서번호	교량보수과-6871
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	교량보수과장
정병구		백운경	10/30 이수근
협조

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

교량보수과

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

실정보고에 대한 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』 추진 중 감독기관인 한강교량 일상유지보수 책임감리원(대한콘설탄트 외)으로부터 서강대교 중앙분리대에 대하여 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고사항임.

공사개요

공 사 명 : 2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2014.04.09 ~ 2015.02.28

공사개요 : 강재도장, 균열보수, 단면보수 등

계약금액 : ￦876,391,350원 (공정율 80%)

시 공 사 : ㈜케이디엠건설 대표 강영숙

감독기관 : ㈜대한콘설탄트,(주)신명건설기술공사

실정보고 내용(대콘감 서부14-81호, ‘14.10.28)

현황

1. 서강대교 닐슨아치교 구간 중앙분리대 부식방지 표면보수 필요

• 서강대교 중앙분리대 보수공사가 표면보수만 남은 마무리 단계로서,

• 동절기 염화칼슘에 의한 염해예방을 위하여 시행하는 공사인 만큼 닐슨아치교 구간도 포함하여 부식방지 표면보수가 필요함.

닐슨아치교 구간

기존 작업지시 구간

검토의견 및 대책

1. 서강대교 닐슨아치교 구간 중앙분리대 표면보수 추가

• 중앙분리대의 표면박락 및 스케일링의 발생원인은 동절기에 살포되는 염화칼슘에 의한 염해발생 때문이므로 닐슨아치교 구간 중앙분리대에 대한 표면보수가 필요함.(L=150m)

• 9차 작업지시에 의해 중앙분리대 표면보수가 시행될 예정이므로 한강교량 구조물의 기능회복이 가능하도록 추가 시행코자 함.

검토의견

위탁 감독기관의 실정보고 내용이 적정하므로 보고내용과 같이 시행토록 승인하며, 추후 설계변경 시 반영토록 한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리용역사에 통보코자 함.

첨 부 : 위탁감독기관 현장실정보고서 1부.   끝.