문서번호	급수운영과-22249
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
오경록		이병운	10/30 김영삼
협조
	주무관		박혁순

시설관리공단 감독업무 월간(10월)공정 보고회 개최결과 보고

2014. 10

중부수도사업소

(급수운영과)

시설관리공단 감독업무 월간(10월) 공정 보고회

Ⅰ		개 요

일  시 : 2014. 10. 30(목) 15:00

장  소 : 급수운영과 사무실

참석자

- 중부수도사업소 : 급수운영과장 외 6인

- 시설관리공단   : 상수도 3팀 장영수 외 1인

Ⅱ		현 황

2014년도 공사현황

(단위 : 건)

구 분	총계	송배수관	배급수관	시설물	항청소	포장복구, 건설폐기물
중부수도사업소	14	5	1	2	2	4
급수운영과	8	2	1	1	1	3
시설관리과	6	3	-	1	1	1

공사 추진 현황(2014. 10. 30 현재)

(단위 : 건)

구 분	계	발 주	착공준비	공사진행	공사중지	비고
계	8	-	-	8	-
송배수관	5	-	-	5	-
배급수관	1	-	-	1	-
시 설 물	2	-	-	2	-

Ⅲ		보고회 결과

주요 보고 내용(시설관리공단)

- 남산소월길 송배수관 정비공사(공정 83%)

• 점검구 설치 : #3, 7, 14, 20(총 4개소)

․  교통량이 적은 시간대(주말)에 시행 예정

• 비굴착 관갱생(#15~17, L=200m) : 2014.11.07한 완료

• 외품질시험 의뢰 완료 : 강도 및 용출시험

• 서울용산국제학교 민원(비산먼지)발생 : 조치완료 현황 및 향후 대책 보고 예정

- 삼각지역 ~ 한강대고 북단간 송배수관 정비공사(공정 82%)

• 분기 연결(17개소) 작업 추진중

• 폐관충진  : 11월10일경부터 시행(중간밸브 설치 후 구간별 시행)

• 실작업 11월 말까지 완료할 수 있도록 공정관리 추진

- 명동 64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사(공정 80%)

• 포장복구 및 현장 정리 정돈 강화

• 각 구간별 시공완료 현황 정리

• 미비 사항 준공전 조치

주요 의견{중부수도사업소(급수운영과)}

- 각 공사장별 준공시점 품질관리 및 안전관리 철저

- 남산소월길 송배수관 정비공사

• 준공대비 사전 설계변경, 공부정리 등 철저

- 삼각지역 ~ 한강대고 북단간 송배수관 정비공사

• 자재 수급 조속조치로 공사 원활하게 진행 될 수 있도록 공정관리 철저

• 서부도로사업소 도로굴착 협의 철저

• 실정보고 철저(설계변경 등)

- 명동 64번지외 6개소 세척갱생관 정비공사

• 공사구간 타절부분 시공사 사전 협의 원활하게 준공 될 수 있도록 조치

끝.