투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	장충체육관 리모델링공사 하도급 변경 계약내용 알림

1. JCR14-351호와 관련입니다.
2. 우리본부에 시행중인 「장충체육관 리모델링공사」의 하도급계약변경이 체결되어 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급 계약내용

하도급공종	업체명	대표자명	당초	변경	비고
철골공사	(주)경수 제철	백종서	1,441,000,000원	1,862,300,000원	금액변경
			14.04.25~14.11.30	14.04.25~14.12.31	공기연장
지붕공사	(주)스틸 라이프	박광춘	621,500,000	621,500,000	변경없음
			12.11.05~14.08.31	12.11.05~14.12.31	공기연장
			621,500,000	1,784,200,000	금액변경
			12.11.05~14.12.31	12.11.05~14.12.31	변경없음
조적, 타일, 미장공사	남용의장 (주)	박익규	345,400,000	345,400,000	변경없음
			12.11.05~14.08.31	12.11.05~14.12.31	공기연장
방수공사	선운건설 (주)	조흥수	187,000,000	187,000,000	변경없음
			13.02.15~14.08.31	13.02.15~14.12.31	공기연장
도장공사	유웰아이엠씨(주)	송용구	156,970,000	156,970,000	변경없음
			13.06.21~14.08.31	13.06.21~14.12.31	공기연장
유리공사	한길유리 (주)	김완선	126,500,000	126,500,000	변경없음
			13.07.22~14.08.31	13.07.22~14.12.31	공기연장
금속 및 창호공사	(주)정우	김봉명	198,000,000	198,000,000	변경없음
			13.05.01~14.08.31	13.05.01~14.12.31	공기연장
보수보강 공사	종만건설 (주)	유영애	423,500,000	423,500,000	변경없음
			13.02.20~14.08.31	13.02.20~14.12.31	공기연장
토공 및 흙막이공사	(주)지토건	김완선	2,330,900,000원	2,330,900,000원	변경없음
			12.07.18~14.08.31	12.07.18~14.12.31	공기연장

붙 임   하도급계약 변경 서류.  (별송) 끝.

	건축부장
주무관	신현성		의료시설과장	양기정		건축부장	10/30 김우성
협조자
시행	건축부-12994	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개