투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사중 교통소통대책에 따른 기간 연장 승인 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2014-10-31 00:10:00

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-617(2014.10.27.)호 및 토목부-20942(2014.10.28.)호 및 교통관리과-30192(2014.10.30.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 암사 정수센터앞 사거리 임시개통에 따른 교통소통대책 공기연장에 대하여 서울지방경찰청으로부터 승인되어 알려드리오니 2014.11.20.개통에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					10/31 최광무
협조자
시행			토목부-21241									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개