문서번호	도로시설과-19165
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		터널복개팀장	도로시설과장
류경엽		김두석	10/31 이용심
협조

천호지하차도 보수공사

예산추가 재배정 검토보고

2014. 10

도로시설과

천호지하차도 보수공사 예산 추가 재배정 검토 보고

동부도로사업소에서 시행하고 있는「천호지하차도 보수공사」와 관련 추가예산 지원 요청에 대한 검토 보고 임.

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	규 모		형 식	설치년도	안전등급
		폭	연장
천호지하차도	강동구 천호동456	16m	355m	RC 박스	1997	B급

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호지하차도 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 6. 2 ~ 11.28

○ 공사개요 : 타일철거 2,800㎡, 타일붙이기 1,379㎡, 표면보수 1,452㎡

○ 도 급 액 : 금651백만원, 도급자 : 세안이엔씨(주)

○ 공 정 률 : 80%(타일붙이기)

□ 현장조사 내용

○ 천호지하차도 박스구간 및 U-Type구간 벽체는 치장블록 위에 타일이     부착되어 있으나, 타일이 노후 탈락되어 타일을 재 부착코자 2014년     공사시행 중에 있음.

○ 박스구간의 벽체 치장블록 상태는 양호 함.

○ U-Type구간 벽체 치장블록 상태는 누수, 백태, 열화 등이 많이 발생 됨.

U-Type구간 벽체 타일	U-Type구간 벽체 타일 철거 후

□ 변경내용

○ U-Type구간은 당초 타일을 제거하고 표면처리토록 계획되었으나,        기존벽체 하단부가 치장블록으로 누수, 백태, 열화 등이 많이 발생되어        기존 블록을 철거하고 하단부 블록을 재설치 후 표면에 타일을  재 설치        하는공법으로 변경(자문회의 결과)

○ 타일부착 공법은 타일 탈락 우려가 있으므로 떠붙이기 공법에서       개량 압착공법으로 변경 시행(자문회의 결과)

- 떠붙이기 : 타일 뒷면에 붙임 모르터를 바르고 바탕에 눌러 붙이는 공법

- 개량압착붙이기 : 붙임 모르터를 바탕면과 타일 뒷면에 바르고 바탕에 눌러 붙이는 공법

○ 공 사 비

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	658,765,590	789,999,000	증131,233,410
도 급 비	651,532,250	771,850,000	증120,317,410
폐기물처리비	7,233,000	10,544,000	증 3,311,000
이설비기타	-	7,605,000	증 7,605,000

○ 주요물량 증․감내역

공 종	단 위	수 량		증․감	비 고
		당초	변경
기존블록철거	㎥	-	126	증) 126
기존 타일제거	㎡	2,800	2,195	감) 605
블록쌓기	㎡	-	704	증) 704
타일붙이기 (떠붙이기→개량압착붙이기)	㎡	1,379	2,827	증)1,448
폐기물처리	㎥	142	207	증) 65

□ 요청내용

○ 천호지하차도 블록 재설치 및 타일부착 공사방법 변경으로 증액된       131,234천원 중 동부도로사업소는 낙찰차액(111,234천원)을       활용하고, 천호지하차도보수공사의 배정잔액 (80,000천원)중        부족액(20,000천원)을 추가지원 요청

□ 처리계획

○ 천호지하차도보수공사 배정잔액(80,000천원) 중 부족액(20,000천원)을       동부도로사업소에 재배정하여 보수공사가 원활히 추진 될 수 있도록       하고자 함.

○ 예산현황

단위 : 천원

2014년 예 산	기배정액	배정가능액	금회배정액	배정잔액	재배정처	비 고
850,000	770,000	80,000	20,000	60,000	동부도로 (시설보수)

붙임 : 천호지하차도 보수공사 예산 재배정 요청 공문1부. 끝.