다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	근로청년공용공간 조성을 위한 공간기획 및 인테리어 디자인용역 준공기한 연기의뢰

1. 재무과-45110호(’14.10.13.), 일자리정책과-13615호(’14.10.31) 관련입니다.

2. 근로청년공용공간 조성을 위한 공간기획 및 인테리어 디자인용역과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 계약업체 : 블랭크(대표 김동리, 문승규)

나. 계약금액 : 21,150,000천원

다. 계약년월일 : 2014.9.2

라. 준공기한 연기

- 당초 : 2014.9.2.~2014.10.31

- 변경 : 2014.9.2.~2014.11.28

붙임 : 1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 준공기한연기 합의각서(원본 별도송부)  1부.   끝.

	일자리정책과장
주무관	이남숙		청년일자리팀장	김성건		일자리정책과장	10/31 엄연숙
협조자
시행	일자리정책과-13663	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 8층 일자리정책과	/
전화	02- 2133-5457	/전송		/		/	대시민공개