함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설계획 변경 알림

1. 관련문서

가. 현장지휘대-6794(2014.7.10.)호 「동자동 제8구역 도시환경정비사업 관련 소방용수시설 이설 계획(알림)」

나. 쌍용건설 제7046-224(2014.10.30.)호 「한강대로 지상식 소화전 이전설치 공사일정 변경」

2. 위와 관련, 우리 관내에서 추진중인 동자동 제8구역 도시환경정비

사업 관련 소방용수시설 이전설치에 대한 공사가 다음과 같이 연기되었음을 알려

드리니, 후암119안전센터장은 소방용수 관리에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경사항

구분	기존	변경
일정	2014. 9. 15.~ 2014. 10. 30.까지	2014. 9. 15.~ 2014. 11. 30.까지
변경사유	공사일정 조정으로 인한 변경신청

○ 대상 소화전 (※ 987, 413호는 공사완료시까지 임시폐전함)

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	987	소화전	지상식	동자동 37-85	1992-12-01	후암
2	413	소화전	지상식	동자동 37-85	1987-12-01	후암

붙임 : 소방용수시설 이설예정지 위치도 및 사진(987호 등 1개소) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	10/31 代윤진욱
협조자
시행	현장지휘대-10475	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개