투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	1지역 작업지시 15차 실정보고 승인 통보(2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부))

1. 대영GE14A-10-12(2014.10.31.)호와 관련입니다.

2.「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)」와 관련하여, 작업지시 15차 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시 내용 : 국민은행방화 외 10개소 교차로

음향신호기 12대 교체

나. 실정보고사항 승인 (작업지시 15차)

1) 작업내용 승인

연번	작업장소	작업내용	승인내용	비고
1	강서구 염창동 염강초교	음향신호기 1대 교체	- 맞은편 구형 음향신호기와 통신 불량으로 맞은편 음향신호기 추가 교체(1대 추가) - 음향신호기 총 2대 교체	1대 추가
2	강서구 등촌동 등촌동사거리	음향신호기 1대 교체	- 음향신호기 세팅값 조정으로 정상운영 됨. - 음향신호기 교체 작업 취소(1대)	작업 취소
3	강서구 화곡동 내발산초교앞	음향신호기 1대 교체	- 맞은편 음향신호기도 고장으로 추가 교체(1대 추가) - 음향신호기 총 2대 교체	1대 추가
음향신호기 총 교체수량 변경사항			- 당초 : 총 12대(11개 교차로) - 변경 : 총 13대(10개 교차로)

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	진흥전력설비(주) 현장대리인,대영유비텍(주) 책임감리원
주무관	박태진		기전과장	10/31 박재경
협조자
시행	기전과-13585	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개