문서번호	도로보수과-6031
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
조경현		11/03 김승태
협조
	주무관		정규용

포장공사 구간 일부변경 계획 보고

- 2014년 노후포장도로 정비공사(A구역) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

남부도로사업소

(도로보수과)

포장공사 구간 일부변경 계획 보고

- 2014년 노후포장도로 정비공사(A구역) -

사평로 일부구간이(반포1동주민센터 → 삼호가든사거리) 도로 소성변형이 심하게 발생되어 민원이 발생하고 있어 정비가 시급하여 노후포장도로 정비공사(A구역) 정비 구간 중 일부를(반포로) 변경하여 우선 정비 시행코자 함

	Ⅰ		현 황

사평로 반포1동주민센터 → 삼호가든사거리 구간에 심한 소성변형이 발생하여 임시방편으로 포장절삭을 시행하였으나 소성현형이 계속 진행되어 동구간을 주행하는 운전자들의 사고위험에 대한 민원이 계속 발생하고 있음

노후포장도로 정비공사(A구역)의 정비 구간 중 반포로(터미널고가 주변)구간이 현재 터미널고가 보수공사를 위해 비계(아시바)가 설치되어 있어 포장정비가 어려운 실정임(12월 이후 철거 예상)

	Ⅱ		검 토 의 견

현장조사 결과 노후포장도로 정비공사(A구역)의 반포로 정비물량과 사평로 민원발생 구간의 공사물량이 비슷하고 포자재(아스콘)가 소성변형에 강한 개질포장으로 되어 있어 당초 반포로 구간(터미널고가 주변)을 사평로 구간(반포1동주민센터 → 삼호가든사거리)으로 변경하여 공사시행 하는 것이 타당하다고 판단됨

	Ⅲ		처 리 계 획

2014년 노후포장도로 정비공사(A구역) 정비구간 중 반포로 구간을 사평로 소성변형 발생구간으로 변경 후 조속히 정비하여 시민불편 해소 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

	Ⅳ		행 정 사 항

공사구간 변경에 따른 물량 증․감 사항은 추후 『2014년 노후포장도로 정비공사(A구역)』설계변경 시 반영 처리

붙임 : 소성변형 발생구간 위치도 및 현황사진 1부.  끝.