투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 - 양화 한강공원 친수공간 조성공사

1. 생태공원과-2454(2014.10.27.)호 관련입니다

2. 위 관련으로 생태공원과에서 추진 중인 『양화한강공원 친수공간 조성공사』에 소요되는 관급 자재에 대하여 납품기한 변경계약을 하고자 합니다.

가. 건   명 : 양화 한강공원 친수공간 조성공사 관급자재 조달구매

나. 변경내용

납 품 요구번호	품 명	규 격	수 량	납 품 기 한		비 고
				당 초	변 경
12-13-1- 55803-00	기타화초	물억새, 식물매트	600㎥	2014.10.26	2014.12.26	지엔지농원
	기타화초	수크령, 식물매트	1,300㎡
12-13-1- 55877-00	레미콘	25-18-08	36.51㎥	2014.10.26	2014.12.26	서울경인레미콘공업(협)
	레미콘	25-21-08	74.71㎡

다. 연기사유 : 공사기한 연기(1차분 준공기한 : ’14.12.26)

붙임 변경요청서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	11/03 최대봉
협조자
시행	총무과-16580	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개