투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	아현3구역 주택재개발조합
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 기간연장 승인(아현3구역)

1. 제20*******01(2014.10.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요청한 교통안전시설물(신호)원인자 부담공사 기간 연장에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 아현제3구역 주택재개발정비사업 교통안전시설물 설치공사

나. 공사내용 : 교통안전시설물(신호)설치공사

다. 공사장소 : 아현 3구역 현장주변

라. 원 인 자 : 아현제3구역 주택재개발정비사업조합

마. 공사기간변경승인

- 당 초 : 2014.7.31.~ 2014.10.30.

- 변 경 : 2014.7.31.~ 2014.11.30.

(교통안전시설정보(TGIS)에 시설물정보 입력후 준공요청)

바. 변경사유 : KT단자 지연설치로 인한 승인기간 변경.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정성욱		주무관	代이한진		기전과장	11/03 장경옥
협조자
시행	기전과-10074	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8410	/	wook4125@seoul.go.kr	/	대시민공개