문서번호	시설개선과-8459
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
노성민		신동호	11/03 박준양
협 조
	주무관			박관현

잠실운동장 풋살경기장 CCTV 설치 계획

2014.11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실운동장 풋살경기장 CCTV 설치 계획

잠실운동장 제1풋살경기장, 제2풋살경기장에 CCTV를 설치하여 풋살경기장 운영 및 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 스포츠마케팅과-10720(2014.10.31.) 잠실제1,2풋살경기장 관리용 CCTV설치 협조

Ⅱ		검토의견

1. 제1풋살경기장 및 제2풋살경기장은 연중 무휴로 운영되므로 상시 모니터가 가능한 청경본부 및 방재실에서 모니터링 할 수 있도록 구성

2. 제1수영장 사무실에 풋살경기장 대관담당자용 모니터 시스템 설치

3. 추후 확장성을 고려하여 광케이블 포설 및 함체 설치

4. 유지보수를 위한 통신실 모니터 선로 구성

5. 제2풋살경기장 CCTV설치는 터파기 공사가 필요하므로 12월 동절기 굴착 금지 기간 전에 신속히 공사 진행

Ⅲ		공사개요

❍ 공사개요

- 제1풋살경기장 CCTV 카메라 1대 설치

- 제2풋살경기장 CCTV 카메라 1대 설치

- 수영장 사무실 CCTV 모니터 시스템 설치

- 주경기장 통신실 CCTV 모니터를 위한 선로 구성

- 배관배선공사 1식

❍ 발주방법 : 조달구매 및 수의계약

- CCTV카메라, 모니터링 장비, 네트워크 장비 등 물품구매설치

- 굴착복구 등 배관배선 공사

❍ 사업비 : 38,000천원

- 물품구매설치 : 18,000천원

- 굴착복구 등 배관배선 공사 : 20,000천원

❍ 추진일정

- 2014.11.4. ~ 11.23. : CCTV 설치 행정예고, 홈페이지 게시

- 2014.11.24. ~ 11.30. : 공사 발주, 계약 및 착공

- 2014.12월 : 준공

Ⅳ		예산조치

❍ 사용예산 : 「잠실운동장 가스터빈발전기 설치공사」집행잔액 사용

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업,

잠실종합운동장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 현장사진

제1풋살경기장	제2풋살경기장

끝.