함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역변경계약체결 (강북정수센터 고도정수처리시설공사 폐기물용역 - 4차)

1. 시설과-6437(2014.10.30.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『강북정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물용역 4차』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 체결하고자 합니다.

가. 계약자 : ㈜건용환경개발

나. 용역기간 : 공사기간 연장(20일연장)

변경전 전체분 2010.06.19. ~ 2014.11.10.

변경후 전체분 2010.06.19. ~ 2014.11.30.

변경전 4차분  2014.03.26. ~ 2014.11.10.

변경후 4차분  2014.06.26.. ~ 2014.11.30.

다. 계약금액 : 변동없음

***************************************

***************************************

**************************

- 공사기간이 연장됨에 따라 폐기물처리기간 연장

3. 계약상대자에게 별첨 용역변경계약서를 G2B시스템을 이용하여 송신하고

자 합니다.

붙임 :  1. 준공기한연기보고서 1부.

2. 공기연장합의서 1부.

3. 변경계약서(초안) 1부. 끝.

주무관	김미정		재무회계과장	박병만		요금관리부장	11/03 이종욱
협조자
시행	재무회계과-14312	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1233	/전송	02)3146-1209	/		/	부분공개