문서번호	교량보수과-4161
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	교량보수과장	동부도로사업소장
윤철식	김환겸	11/03 송상영
협 조

잠실철교(도로교)보수공사 설계변경(1회-준공) 검토보고

2014. 10

잠실철교(도로교)보수공사 설계변경(1회-준공) 검토보고

잠실철교(도로교)보수공사에 대한 공사가 완료됨에 따라 당초 예산부족으로 미발주 한 잔여물량 추가시공 등에 따른 설계변경(1회-준공) 보고임

Ⅰ		보고근거

설계변경 보고(1회-준공 : 공사감독1처-11072호, 2014.10.31)

변경설계서 제출(1회-준공 : 공사감독1처-11077호, 2014.10.31)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 잠실철교(도로교)보수공사

공사기간 : 2014.05.12 ~ 2014.11.28.

도 급 비 : 872,890천원

공사개요 : 강재 외부도장 7,282㎡, 비축자재 정비 2,582㎡

도 급 자 : (주) 강선이앤씨 대표 강승구

Ⅲ		주요 설계변경 현황

공사 발주시 예산부족에 따른 미 발주 잔여물량(당초 계약분의 연장선) 추가시공에 따른 실 시공물량 정산 반영

기타 보험료 및 안전관리비 등 최종 정산 설계변경 반영

주요공종 수량 증∙감 현황

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증∙감
강재 표면처리	㎡	7,282	9,082	1,800
거더 외부도장	㎡	7,282	9,082	1,800
공간비계설치	㎡	4,850	6,050	1,200
보호막 설치	㎡	10,789	13,459	2,670

※ 공종별 세부 물량 및 예산내역은 따로붙임 “설계변경내역서” 보고

설계변경 총괄현황

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
계		872,890,000	1,023,440,000	증)150,550,000
도급비	공급가액	793,536,364	930,400,000	증)136,863,636
	부가가치세	79,353,636	93,040,000	증) 13,686,364
	계	872,890,000	1,023,440,000	증)150,550,000

Ⅳ		보고자 의견

공사발주시 예산부족으로 미발주 잔여물량(당초 계약분의 연장선) 추가시공 등 실 시공물량 정산에 따른 설계변경(1회-준공)으로서, 시설관리공단에서 제출한 설계변경 내역이 타당한 것으로 판단되므로 설계변경 시행코자 함.

붙임 : 1) 시설관리공단 변경설계서 제출공문 1부.

2) 시설관리공단 설계변경(1회-준공) 보고서 1부.

3) 변경설계서 1부.  끝.