투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	잠실철교(도로교)보수공사 설계변경 시행(준공)

잠실철교(도로교)보수공사 준공에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

나. 공사기간 : 2014.05.12 ~ 2014.11.28.

다. 도 급 자 : ㈜강선이앤씨 대표 강승구

라. 설계변경내역

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
계		872,890,000	1,023,440,000	증)150,550,000
도급비	공급가액	793,536,364	930,400,000	증)136,863,636
	부가가치세	79,353,636	93,040,000	증) 13,686,364
	계	872,890,000	1,023,440,000	증)150,550,000

마. 예산과목

1) 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 한강교량관리, 잠실철교(도로교) 보수공사, 시설비 및 부대비(시설비 → 880,000,000원)

2) 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 교량시설물운영, 한강교량 긴급복구비축자재정비, 시설비 및 부대비(시설비 → 143,440,000원)

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	윤철식		교량보수과장	김환겸		동부도로사업소장	11/03 송상영
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-4170	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동 2번지) 동부도로사업소(교량보수과)	/
전화	02-2040-0381	/전송	02-2040-0308	/	ycs1000@seoul.go.kr	/	대시민공개