문서번호	설비부-12209
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이동기	이달영	11/03 박기형

- 경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사 -

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

- 경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사 -

설계변경 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』와 관련하여 책임감리단으로부터 설계변경심의 지적사항을 반영한 설계도서 및 보안서류 제출이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

관련근거

○ 공원조성과-9830(‘14.08.21)

경춘선 폐선부지 공원조성사업(1단계) 보완설계 도서 송부

○ 경의경춘(감) 제2014-765호(‘14.10.31)

설계변경 소위원회 심의결과 반영 설계도서 검토보고

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사

○ 규    모 : 공원조성구간 1.9km, 방송설비 42개소, CCTV설비 15개소

○ 계 약 자 : 아산정보통신(주), 대표 홍수길

○ 공사기한 : 2013.10.10. ~ 2015.01.09.

○ 계약금액 : ₩301,430,330원(1차 – 200,000,000원)

○ 감 리 단 : ㈜유신, 책임감리원 윤상렬

보고내용

○ 변경 사업비

(금액 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	535,601,330	491,734,000	(감)43,867,330
도급비	301,430,330	225,073,000	(감)76,357,330
관급비	234,171,000	234,171,000	-
이전비	0	32,490,000	(증)32,490,000

○ 변경 주요내용

구분	당 초	변 경	변경사유	비 고
도급비	전선관 13,338m 케이블 39,250m 제어반 3개소	전선관 9,101m 케이블 13,958m 제어반 2개소	- 조경 기본계획 변경에 따른 물량감소 CCTV 케이블 UTP->광케이블 변경에 따른 물량 변동. CCTV 전원케이블 추가.
이전비		도로횡단에 따른 도로굴착비 (관리청 복구) 제어반 한전수용비	도로 횡단을 위한 굴착복구비 및 한전수용비 미 계상에 따른 추가

○ 심의결과 반영

구분	지적사항	조치내용	변경금액 (단위 :원)	비 고
내역서	견인선 모든 배관에 인력포설을 기계포설로 설치요함	공기압 포설 품셈 적용	(감)9,669,000
내역서	배관부속품은 옥외에서 적용하지 말것	기존 배관부속품 15% 책정근거 없어 삭제함.	(감) 6,215,000
내역서	아스팔트 포장은 도로관리청 복구 이므로 아스팔트 포장에 대하여는 삭제요함.	일위대가에서 아스팔트 포장에 대한 내역은 삭제 반영	(감)1,925,000
내역서	재료할증율 옥외공사 3% 적용	옥외공사 재료할증 3%적용함.	(감)9,746,000
공사비 증·감액(제경비 포함)			(감)29.086.000

담당자 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원화 공사 책임감리단의 『설계변경 소위원회 심의결과 반영 설계도서 검토보고』건에 대하여 검토결과 심의 지적사항 반영에 따른 공사비 검토가 적합하다고 판단됩니다.

○ 건설총괄부에 계약변경의뢰를 시행코자 합니다.  끝.

붙   임 : 1. 공원조성과 설계변경 관련공문    1부.

2. 감리단 설계도서 검토보고        1부.   끝.