투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 구매물량 변경계약 요청(메쉬휀스 2건)

1. 건설총괄부-20276(2014.10.31.)호, 건설총괄부–20277(2014.10.31.)호, 방재시설부-11081(2014.11.3.)호 및 경의경춘(감)-763(2014.10.31.)호와 관련입니다.

2. 경의선숲길 공원조성공사에 소요되는 자재(메쉬휀스)의 구매물량 변경계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역

납품요구번호 (계약번호)	품 명(규격)	단위	수 량
			당초	변경	반입량	잔량	비고
12-14-1 -49963-00	금속재울타리 (메쉬휀스)	경간	125	117	117	-
	금속재울타리 (출입문)	m2	3.6	3.6	3.6	-	변동없음
12-14-1 -45455-00	금속재울타리 (메쉬휀스)	경간	117	115	115	-

나. 변경사유 : 현장여건에 따른 물량정산

붙임 : 감리단 관급자재 납품기한 연기요청 1부.

	방재시설부장
★주무관	전지홍		공원시설과장	정일환		방재시설부장	11/03 임춘근
협조자
시행	방재시설부-11115	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서울특별시청 서소문별관 2동 2층)	/
전화	3708-8733	/전송	3708-8756	/	bethechange@seoul.go.kr	/	대시민공개