문서번호	시설과-6535
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
이호식	김인규	이규상		11/03 정득모
협 조

암사정수센터시설현대화 및 고도정수처리시설공사 중

폐기물처리용역 준공기한 연기보고서

2014. 11.

상수도사업본부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 중

폐기물처리용역 준공기한 연기보고서

1. 현   황

가. 용 역 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 중 폐기물처리용역

나. 위    치 : 서울시 강동구 아리수로 131

다. 계약금액 : 전체분(367,504,000원) 1차분(150,000,000원),

2차분(48,488,000원), 3차분(49,016,000원),

4차분(금차분) (120,000,000원)

라. 용역규모 : 전체분(폐아스콘 - 5,097ton, 폐콘크리트 - 6,185ton,

건축폐자재 - 1,486ton, 혼합폐기물 - 1,973ton, 임목폐기물 - 2,589ton)

4차분(폐아스콘 - 1,188ton, 폐콘크리트 - 205ton, 건축폐자재 - 1,001ton,

혼합폐기물 - 1,471ton, 임목폐기물 - 20ton)

마. 감 리 사 : 범한엔지니어링종합건축사사무소외 1개사

바. 용 역 사 : 하나환경산업(주), 설성산업

2. 연기요청 기한

구분		당초	변경	비 고
전체분	계약금액	367,504,000	367,504,000	변경없음
	계약기간	‘09.10.07~‘14.11.20	‘09.10.07~‘14.12.05	증 15일
4차분	계약금액	120,000,000	120,000,000	변경없음
	계약기간	‘14.03.25~’14.11.20	‘14.03.25~’14.12.05	증 15일

※시설공사 준공기한 : ‘14.11.25

3. 연기사유

가. 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사의 준공기한 연장에 따른 폐기물처리용 완수기한 변경

4. 조치의견

가. 지방자치단체 용역계약 일반조건

: 제6절(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정) 제1조 과업내용의 변경 가항 계약담당자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있다.

1). 추가업무 및 특별업무의 수행

2). 용역공정계획의 변경

3). 당  초 : 전체 2009.10.07. ~ 2014.11.20.

4 차 2014.03.25. ~ 2014.11.20.

4). 변  경 : 전체 2009.10.07. ~ 2014.12.05.

4 차 2014.03.25. ~ 2014.12.05.(15일 연기)

5). 지체상금 부과여부 : 미부과

2014. 11. 02.

보고자 : 지방시설주사 이 호 식