문서번호	시설관리과-29277
결재일자	2014.11.3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
황필권	손병희	11/03 나태산
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(2014년 전기시설물 유지보수공사)

2014. 11.

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

설계변경 심의자료

가. 공사명 : 2014년 전기시설물 유지보수공사

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2014. 11.3.(월) 09:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 손병희, 6급 최명익, 6급 이태원

6급 이병운, 6급 오도영

마. 공사개요 :

◦ 가압장·배수지등 전기시설물 보수 및 교체공사

◦ 가압장·배수지등 등기구 정비 및 배선공사

◦ 기타 정비가 필요한 시설물에 대한 정비공사

바. 계약기간 : 2014. 03. 11. ~ 2015. 2. 28.

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (부가세포함)	***********	***********	***********

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용(최종)

1. 공사 현황

가. 공사명 : 2014년 전기시설물 유지보수공사

나. 공사개요 :

◦ 가압장·배수지등 전기시설물 보수 및 교체공사

◦ 가압장·배수지등 등기구 정비 및 배선공사

◦ 기타 정비가 필요한 시설물에 대한 정비공사

다. 계약기간 : 2014. 03. 11. ~ 2015. 2. 28.

라. 수 급 인 : 현대전기건설공사   ******

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : 접지봉설치(접지봉 14Φ×1000 mm) 등 30개 공종

- 물량감소 : 접지선 설치(10㎟) 등 118개 공종

나. 신공종 및 신규자재 발생

- 신규공종 : 서지보호기(1등급)설치 등 77개 공종

- 서지보호기(3Ø4W 20KA,KS인증,1등급) 등 50개 품목 신설

다. 경비부분 중 건강보험료, 연금보험료 등 증빙이 될 수 없는 부분에 대해서 감액

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증·감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 도급액 범위 내에서 물량변동

다. 신 공종에 대해 낙찰률을 적용

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부

2. 심의위원회 의견 1부.  끝.