문서번호	설비부-12252
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김홍석		이흥복	11/03 박기형
협 조

서대문고가차도 철거 전기·신호공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

서대문고가차도 철거 전기·신호공사 추진계획

우리본부에서 추진중인 『서대문고가차도 철거공사 』의 전기·신호분야에 대하여 공사발주 계획 보고임.

Ⅰ				관 련 근 거

□ 고가차도 세부철거계획 수립(행정2부시장방침 제667호, 2009.12.14)

□ 시설공사 발주방법 검토보고 (국장방침 토목부-20162호, 2014.10.17)

Ⅱ				사 업 개 요

□ 공 사 명 : 서대문고가차도 철거 전기·신호공사

□ 위    치 : 서대문구 충정로 1가 62(서대문역 사거리)

□ 사업내용

- 고가차도 철거(폭 11.5m, 연장 374m)

- 보도정비 및 신호설비 교체

□ 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 06.

□ 추정공사비 : 57억원 (전기 2.1억원)

□ 설 계 사 : (주)신명건설기술공사

Ⅲ				사업추진 경위

□ ′09. 12.  고가차도 세부철거계획 수립 (행정2부시장 방침)

□ ′11. 04.  고가차도 철거추진계획(도시안전실 도로계획과)

□ ′12. 02.  건설기술심의 및 설계준공

□ ′14. 10.  서대문고가차도 철거공사 발주 (토목부)

Ⅳ				전기공사 발주계획

□ 공사 도급액 : 217,402천원(1차 : 20,000천원)

- 전기 43,480천원,  신호 173,922천원

- 예산과목 : 도시개발특별회계, 도시안전실도로시설과, 교량관리,

고가차도 및 입체교차로 관리, 서대문고가철거, 시설비

□ 계약방식 : 장기계속계약(총 계약금액을 부기하고 금차분 집행액

범위내에서 1차 계약)

□ 발주방법 (전기 5억 미만)

① 지역제한 : 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

② 자    격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체

□ 공사기간 : 착공일로부터 7개월 (1차: 착공일로부터 4개월)

※ 전기감리는 토목부에서 전면책임감리용역에 포함하여 발주시행

Ⅴ				향 후 계 획

□ 2014. 11 : 공사발주

□ 2014. 12 : 공사계약 및 착공

□ 2015. 06 : 공사 완료 및 개통. 끝