함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 따른 검토결과 회시(신도림동 271-87호 외 1개소)

1. 공사감독2처-18183호(2014.10.28)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여“신도림동 271-87호 외 1개소 송배수관 정비공사”의 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 회시하오니 설계변경 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회시내용

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검토 결과
1	신도림동 구간은 당초 D=1000mm 로 설계되어 있으나 굴착결과 기존관이 D=900mm로 확인	신도림동 구경 변경 (당초1,000mm→변경 900mm)	900mm로 시행하고 설계변경 시행
2	신도림동 구간 안양천변의 발생토는 산업폐재류가 다량 섞여있고,악취발생 물질이 포함된 폐토사로 현장 확인결과 김포매립지 반입이 불가할 뿐아니라 개인 사토장 변경시 에도 반입불가	신도림동 구간 발생토 폐토사 처리	우리사업소와 계약 된 폐기물처리 업체에 처리하고 설계변경 시행

끝.

	강서수도사업소장
주무관	황청연		주무관	김용호		급수운영과장	10/28 조면행
협조자
시행	급수운영과-25725	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02)3146-3957	/전송	02)3146-3989	/		/	대시민공개