투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(체육진흥과장)
(경유)
제 목	예산확보 요청 (시급)

1.  체육진흥과 –12320(2014.10.23)호와 관련입니다

2. 장충체육관 리모델링공사가 진행중이나 내역누락 및 2015년 설치 예정이던 전광판구매, 주차관제 설치 등으로 인해 공사완료를 위한 예산이 부족한 상황으로 건축물의 준공을 위한 추가  필요예산 및 서울시설공단 요구 반영이 시급한 확보 예산을 재 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가.  준공을 위한 추가 확보 필요 예산          (   910백만원 )

나.  시설공단 요구 반영이 시급한 확보 예산    ( 1,189백만원 )

3. 위의 예산이 확보되지 않을 시는 설계된 내용대로의 준공 및 시설공단 요구 사항 중 붙임 요구사항의 반영이 불가함을 알려드리오니 11월 20일전에 남은 차수의 공사  발주가 가능할 수  있도록 하여 주시기 바랍니다

붙임 : 예산관련 검토 보고.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신현성		의료시설과장	양기정		건축부장	11/04 김우성
협조자
시행	건축부-13141	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)