투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	단가협의를 위한 회의참석 요청(2차)

1. 토목부-20468(2014.10.22.)호 및 세원(동부)14-312(2014.10.24.)토목부-20797(2014.10.27.)호와 관련입니다

2. 『노원교 연결 램프철거공사』 단가협의와 관련 귀사와 우리본부간에 제시한 단가산출 방식이 상이하여 회의를 개최한 결과 원만한 협의가 이루어지지 않아 최종 단가를 결정코자 하오니 2014.11.06.(10:30)일까지 우리부로 내방하여 주시기 바랍니다.

❍ 귀사 의견

- 기존 수량 : 기존 단가 적용

- 증가 및 신규 수량 : 설계단가(100%)적용 후 기존 제잡비 적용

❍ 우리부 의견

- 기존 수량 : 기존 단가 적용

- 증가 및 신규 수량 : 설계단가에 낙찰율(73.29%) 적용후 기존 제잡비 적용.

3. 아울러 노원교 연결램프 철거 공사 착공전 주민홍보(프랑카드, 입간판 설치 등)와 예산불용 방지에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	세원건설(주) 대표이사,동부간선도로확장공사(3공구) 책임감리원 김구환 귀하
주무관	장종환		교량건설과장	이동훈		토목부장	11/04 노우성
협조자
시행	토목부-21505	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개