문서번호	설비부-12295
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		권오식	11/04 박기형
협조

「구리암사대교 연결도로 건설공사」

암사정수장 지장물이설 관련 설계변경 소위원회 자문결과 조치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시기반시설본부

설  비  부

「구리암사대교 연결도로 건설공사」

암사정수장 지장물이설 관련 설계변경 소위원회 자문결과 조치보고

토목부에서 『구리암사대교 연결도로 건설공사』 설계변경을 위한 자문요청이 있어 설계변경 소위원회 자문결과 조치한 내용임.

□ 관 련 근 거

○ 토목부-16041(‘14.08.19) : 설계변경 도서 검토 요청

□ 설계변경개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사내용 : 암사정수장 지장물 이설(보안등 10본, CCTV 5본, 진동감지센서 등)

○ 설계금액 : 155,100 천원

○ 시 공 사 : 신성건설(주)외 2개사

□ 추 진 사 항

○ 2014.08.19. : 설계변경 자문 요청(토목부-16041)

○ 2014.09.16. : 설계변경 소위원회 자문요청

○ 2014.09.29. : 설계변경 소위원회 자문실시(지적사항 보완하여 재심의)

○ 2014.10.16. : 설계변경 소위원회 재심의 요청(설비부-11532)

○ 2014.10.29. : 설계변경 소위원회 자문실시(지적사항 보완, 조건부)

○ 2014.10.31. : 설계변경 소위원회 재심의 조치결과 제출

- 설계변경 소위원회 조치결과 금액 : 92,200 천원

□ 보 고 내 용

○ 설계변경 검토내용

- 변경사유 : 암사아리수정수센터 방호울타리 이설에 따른 부속시설물 이설

- 자문결과

(단 위 : 천원)

공 종		설계변경 요 청	소위원회 자문결과	증·감
보안등	•가설 보안등 설치 10개소	40,367	38,966	1,401
	•보안등 복구 10개소
	•케이블 포설
	•전선관 설치
CCTV	•가설 CCTV 설치 5개소	13,834	8,988	4,846
	•CCTV 복구 5개소
	•전선관 설치
진동감지센서	•함체설치 6대	62,710	16,962	45,748
	•시그널디텍터 6set
	•케이블 포설
	•비상호출 케이블
기 타 공 사		1,187	1,187
간 접 비		18,553	14,863	3,690
일 반 관 리 비		6,532	3,870	2,662
이 윤		11,917	7,364	4,553
합 계		155,100	92,200	62,900

□ 조 치 의 견

○ 설비부 설계변경 소위원회 자문결과를 토목부에 통보

붙임 :  1. 설계변경 소위원회 자문결과 1부.

2. 감리단 조치결과 보고 1부. 끝.