문서번호	기전과-10091
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 11/04 장경옥
협조
	주무관		代이한진

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11. 4(화)

서부도로사업소

(기  전  과)

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토 보고

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사의 업무수행 중에 감리업체가 제출한 실정보고 사항에 대하여 내용을 검토하고 아래와 같이 결과를 보고 드림.

1		관 련 근 거

□ 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기공사 실정보고 제출

○ 도로교통공단 서울특별시지부 안전시설부-26(2014.10.28.)호

2		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 은평노인종합복지관, 동대문디자인플라자 주변

□ 공사개요 : 교통신호기 위치조정 및 신설(교체)

□ 계약금액 : 금15,559,000원(금일천오백오십오만구천원)

□ 공사기간 : 2014. 8. 14. ~ 2015. 2. 9.

□ 계약업체 : 신흥트래픽(주) 대표 윤 선 희

□ 감리업체 : 도로교통공단 서울특별시지부

3		실정보고 내용 및 검토결과

공 사 장 소	변 경 내 용	겁토결과
은평노인 종합복지관	- 제어기 구형 좌대 및 차광막을 신형 좌대 및 차광막으로 교체 기존 관로가 선통되어 보도굴착 삭제 현장여건에 따라 교통정리요원 변경	타당
동대문디자인 플라자 주변	- 설계누락에 따른 DB입력 및 종합시험 공종 반영	타당

□	변경예상금액 : 증)약2백만원

○ 실정보고서 붙임 참조

4		조 치 의 견

□ 감리업체의 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선      변경하여 작업토록 지시하고 추후 준공보고 시에 정산물량      반영하여 설계변경 시행하고자 함

붙임  감리업체 실정보고서 1부.  끝.