문서번호	급수운영과-23786
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		남부수도사업소장
남철우	강동길	장시명		11/04 전영석
협 조
	주무관		최선보

설계변경(제1회) 검토 보고

(2014년 가산동외 9개동 상수도공사)

2014. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(제1회) 검토 보고

(2014년 가산동외 9개동 상수도공사)

「2014년 가산동외 9개동 상수도공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따라  신규공종 및 물량 증․감이 예상됨에 따라 설계변경 공사추진에 만전을 기하고자함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요

- 당 초 : D=13~300㎜, L=2,131m

- 변 경 : D=13~300㎜, L=2,521m

○ 계약기간 : 2014.7.1. ~ 2015.6.30.

○ 계약금액 : 금564,164,130원

○ 계 약 자 : 혜솔건영 대표 정혜랑

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

(제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정)

□ 설계변경 사유

○ 공사시행중 현장 시공여건 변화 및 연간단가계약 공사의 특수성으로 신규 공종 및 물량변동(증․감) 발생

- 대형계량기 설치공(100mm)등 20개 공종 신규발생

- 슬립조인트접합 공(20mm)등 74개 공종(자재) 물량변동

□ 설계변경 내역

○ 주요 신규공종

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
보호통 철거공	20-30mm,지세	개소	-	20	419,660
부단수천공 분기점분기	250×연결관 40~50mm,지세	개소	-	5	467,765
대형계량기설치공	100mm,지세	개소	-	2	258,066
보조 기층공	t=20cm,10㎡이상,지세	a	-	2	369,174
CONC-기계비빔타설	t=20cm(10㎡이상),지세	a	-	2	3,775,610
코어천공	200mm,t=30(벽체),지세	개소	-	2	220,124
관보온공	150mm,50mm이하,지세	m	-	11	207,790

○ 주요 물량 증․감

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
인력터파기(용수,협소)	견질토사 1-2m(지세)	㎥	109	126	745,382
기계다짐(보통)	램머(80kg)	㎥	1039	1101	253,580
나사조임식이음관접합	30mm(지세)	개소	74	9	△1,043,510
슬립조인트접합공	50mm(지세)	개소	177	127	△757,700
주철직관부설공	100mm(지세)	m	66	456	1,727,700
타이튼조인트관 접합공	100mm(지세)	개소	21	68	498,059
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=80,사각받침철개고정,지세	개소	10	2	△2,945,728

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공급가액	512,876,482	512,876,482	0
부가가치세	51,287,648	51,287,648	0
도 급 비	564,164,130	564,164,130	0

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 ‘설계변경 심의위원회’ 사전심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 재계약 후 공사 추진에 만전을 기하고자함.

붙 임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.