투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 승인(동호대교 남단 진입램프 개량공사)

1. 공사감독2처-18673(2014.11.3.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 수행중인 『동호대교 남단 진입램프 개량공사』에 대하여 실정보고한 내용 검토 후 아래와 같이 승인하오니 공정관리 및 품질관리, 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 천공장비 운영, 자재반입 및 조립 등 작업공간 확보에 필요한 사항이 반영된 것으로  원활한 작업 추진을 위하여 타당한 것으로 판단되며, 성토물량 증가 등에 따른 공사비 증액분(73백만원)에 대하여는 낙찰차액 등 집행잔액(203백만원) 한도내에서 추후 설계변경시 실물량 정산 반영 조치할 것. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		성동도로사업소장	11/04 代홍영두
협조자
시행	교량보수과-3389	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1581	/전송	02)2210-1587	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개