문서번호	시설관리과-3060
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장
유충현	박희철	전결 11/04 차광재
협 조	총무과장		최대봉
	주무관		오상협

공사 설계변경 시행보고(제2회 - 준공)

‘14년 한강공원 기반시설 개선공사  -

2014. 11

시설부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공사 설계변경 시행보고(제2회 - 준공)

《 ‘14년 한강공원 기반시설 개선공사 》

시행중인‘14년 한강공원 기반시설 개선공사가 완료되어 준공에 따른 일부  공종별 계약물량 및 도급비 변경(감)에 따라 설계변경하여 공사 준공에 만전을 기하고자 함

공사개요

❍ 공사위치 : 잠원공원 수영장 진입도로 등 6개소

❍ 공사규모

- 도로확장 80m(폭 5.5 → 6.5m), 아스콘포장 18.44a, 보도블럭포장 2.58a,

- 호안브럭정비 1,304㎡, 측구수로관설치 780m, 난간설치 850m 등

❍ 공 사 비 : 646,083천원 (도급비 432,543천원)

❍ 공사기간 :‘14. 4. 17 ~ ‘14. 12. 31

❍ 시 공 사 : ㈜한두건설엔지니어링 대표 정민호

변경사유 및 현황

❍ 폐기물 정산(감 4,743천원) 및 이설비 감액(36,230천원)

- 페기물 통합발주시행 본부장 방침서(3개사업) : 시설관리과-938로(‘14. 4. 7)

❍ 기 타 : 단순 물량수량 증 ․ 감으로 도급비 감액(793천원)사항 임

공 종	단위	물 량			금 액(천원)
		당초	변경	증 ․ 감
토 공	㎥	2,512	2,787	275	증) 363
아스팔트포장	a	20	18	-2	감) 539
호안브럭설치	㎡	995	215	-785	감) 9,703
측구수로관설치	m	818	786	-32	감) 181
콘크리트포장	a	1.95	-	-1.95	감) 202
보차도경계석 설치	m	638	647	9	증) 122
차선도색(횡색+백색)	m	1,729	2,070	341	증) 2,643
안전난간설치	㎥	850	893	43	증) 6,678
초화류식재(억새풀)	주	1,502	-	-1,502	감) 2,292

설계변경 내역

❍ 설계변경 (1회)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	646,083,000	646,083,000	-
도 급 비	432,543,000	432,543,000	-	․ 도급비 변경없음
관 급 비	158,300,000	158,300,000	-
이 설 비	55,240,000	36,230,000	감) 19,010,000
폐기물처리	-	19,010,000	증) 19,010,000	․ 이설비 사용

❍ 설계변경 (2회)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	646,083,000	593,017,000	감) 16,836,000
도 급 비	432,543,000	431,750,000	감) 793,000	․ 도급비 (감)
관 급 비	158,300,000	147,000,000	감) 11,300,000
이 설 비	36,230,000	-	감) 36,230,000
폐기물처리	19,010,000	14,267,000	감) 4,743,000

조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 공사 준공에 만전을 기하고자 함.

첨   부 : 1) 통합발주 방침서 1부.

2) 변경내역서(2회) 1부.

3) 변경도면 1부.  끝.