투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	뚝섬 자벌레 한강 복합전시관 조성 기본계획 수립을 위한 학술용역 계약변경 요청

1. 문화홍보과 제667호(2014. 3.18) 및 제3177호(2014.10.31)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 뚝섬 자벌레 한강 복합전시관 조성 기본계획 수립을 위한 학술연구 용역의 준공기한을 아래와 같이 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

-    아    래    -

가. 계 약 명 : 뚝섬 자벌레 한강 복합전시관 조성 기본계획 수립을 위한 학술연구용역

나. 계약금액 : 금49,500,000원

다. 계 약 자 : 스튜디오바프주식회사

라. 변경내용 : 준공기한 - 기존, 10.15(수) → 변경, 12.15(월)

마. 변경사유 : 우리시의 요청으로 연구내용 중 복합전시관 조성 후 시설 재정자립도 확보 방안을 보완하기 위한 추가 연구기간 소요

따로붙임 :	1. 자벌레 활성화를 위한 ‘한강 복합전시관’ 조성 추진 기본계획 1부

2. 자벌레 한강 복합전시관 조성 기본계획 수립을 위한 학술용역 준공기한 연장

3. ***********

	문화홍보과장
★주무관	김세정		문화홍보과장	11/04 오석근
협조자
시행	문화홍보과-3199	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 한강사업본부	/	http://hangang.seoul.go.kr/
전화	02-3780-0796	/전송		/	sejeong@seoul.go.kr	/	부분공개(7)