문서번호	주거환경과-9722
결재일자	2014.11.4.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	주거환경과장	주거재생정책관		주택정책실장
김영현	최성태	이용건		11/04 진희선
협 조	물재이용관리팀장		이웅희
	주거환경행정팀장		류재인

은평구 응암동 및 녹번동(산골마을) 주거환경관리사업

기반시설 정비공사 예산 재배정 계획

2014.11

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	은평구 주민	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	은평구청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

은평구 응암동 및 녹번동(산골마을) 주거환경관리사업

기반시설 정비공사 예산 재배정 계획

은평구 응암동 및 녹번동(산골마을) 주거환경관리사업의 공공사업 부문에 대한 기반시설 정비 공사비를 자치구에 재배정하여 원활하게 사업추진코자함.  (※ 재배정 금액 : 1,179,936천원)

사업 개요

❍ 위치 : 은평구 응암동 31번지 및 녹번동 71번지 일대

❍ 면적 : 13,896㎡

❍ 용도지역 : 제2, 3종일반주거지역

❍ 규모 : 인구 550명 / 거주세대 270세대 / 70개동 / 124필지

❍ 사업내용

- 재해없는 마을만들기(하수도정비, 가로환경개선, 보안방범 등)

- 쾌적한 마을만들기(담장허물기, 도로포장, 쓰레기집하장 설치 등)

- 가족같은 마을만들기(마을회관 조성사업)- 별도 용역중

추진 현황

❍ ‘12.05.03 : 주거환경관리사업 대상지 선정

❍ ‘12.12.27 : 주거환경관리사업 기본계획 수립용역 착수

❍ ‘13.03.09 : 제1차 주민설명회

❍ ‘13.04.15 ~ 06.11 : 주민워크숍(5회)

❍ ‘13.09.24 : 제2차 주민설명회

❍ ‘13.12.05 : 산골마을 주거환경관리사업 구역 및 계획 결정고시

❍ ‘13.12.24 : 기반시설 부분 실시설계 착수

❍ ‘14.06.20 : 빗물관리시설 설치안 자문(물관리정책과)

❍ ‘14.09.15 : 계약심사 요청

❍ ‘14.10.13 : 빗물관리시설관련 실무회의(예산지원 검토 : 50백만원)

재배정 계획

❍ 재배정액 : 1,179,936천원(재배정처 : 은평구청)

❍ 재배정 내역                                         (단위 : 천원)

구 분	총공사비	토목공사	전기공사 (보안등)	통신공사 (CCTV)	건설폐기물 처리용역	재배정액	주관부서	비고
은평구 산골마을	1,179,936	950,614	38,668	148,280	42,374	1,129,936	주거환경과
						50,000	물관리정책과	빗물관리

❍ 예산 과목 : (부서)주택정책실 주거환경과 (정책)평생 살고 싶은 마을만들기 추진 (단위)주거지 재생사업 추진(도정) (세부)주민참여형 주거지 재생사업(통계목) 시설비

향후 계획

❍ ‘14. 11. : 기반시설 공사비 예산 재배정(시 → 자치구)

❍ ‘14. 12. : 시공사 선정, 계약 및 착공

❍ ‘15. 10. : 기반시설 공사 완료

※ 마을회관 조성사업(응암동 : 리모델링, 녹번동 : 신축)은 실시설계중으로 11월중 계약심사 및 예산재배정 후 금년내 착공 예정

붙임 1) 산골마을 기본구상 및 종합계획도 1부.

2) 산골마을 기반시설 정비공사 예산요청 공문(은평구청) 1부.

3) 시비 재배정 교부 결정서 1부.

4) 원가계산산서(계약심사 반영) 1부.  끝.