의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-23517	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(교육수석전문위원),기획담당관

주무관	교통정책과장	교통정책관	도시교통본부장		결재
최연호	代민수홍	백호	11/04 김경호
협 조
	교통기획팀장			민수홍
	광역교통팀장			노병춘

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 703번, 김용석의원, 교육위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

김 용 석 의원(교육위원회, 새누리당)

요구번호 703번

4. 서울도시철도(경전철) 9개노선(우이-신설, 우이-신설연장선, 신림선, 동북선, 면목선,        서부선, 목동선, 난곡선, 위례신사선) 관련,

- 추진 경과 및 향후 일정

- 2012~2014.9.30. 서울시와 국토교통부간 상기 도시철도 관련 주고받은 공문(별첨제외)

- 상기 노선 관련 민간제안 현황

□  추진경과 및 향후 일정

노선명	사 업 개 요		추진 경과 및 향후 일정
	사업규모	사업구간
우이 신설선	11.4km 정거장 10	여의도 ~서울대	- ’05.10 기본계획 확정 - ’09.09 실시계획 승인 및 착공 - ’14.10월 현재 : 공사 중 (53%) - ’16년 말 : 공사 완료 예정
신림선	8.06km 정거장 11	여의도 ~서울대	- ’10.02 사업제안서 접수 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 민간사업자와 협상중 - ’15년 하반기 : 공사 착공 예정
동북선	13.34km 정거장 15	왕십리역 ~상계역	- ’10.09 사업제안서 접수 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 민자적격성 재조사 및 민자협상 중 - ’15년 하반기 : 공사 착공 예정
면목선	9.05km 정거장 12	청량리 ~신내동	- ’07.12 사업제안서 접수 - ’11.07 제3자 제안공고 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 교통수요예측 재조사 중(PIMAC) - ’15년 하반기 : 제3자 재공고 예정
서부선	16.15km 정거장 16	새절역 ~서울대입구역	- ’08.08 사업제안서 접수 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 변경제안 여부 검토 중(최초제안자)
우이-신설 연장선	3.50km 정거장 3	우이동 ~방학역	- ’08.11 도시철도기본계획 확정 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 변경(안) 승인 검토 중 (국토부)
목동선	10.87km 정거장 12	신월동 ~당산역	- ’08.11 도시철도기본계획 확정 - ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 변경(안) 승인 검토 중 (국토부)
난곡선	4.13km 정거장 5	보라매공원 ~난향동	- ’13.12 기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 변경(안) 승인 검토 중 (국토부)
위례 신사선	14.83km 정거장 11	위례~신사	- ’14.05 위례신도시 광역교통개선대책 확정(국토부) - ’14.07 기본계획 변경(안) 수정제출(시→국토부) - ’14.10월 현재 : 변경(안) 승인 검토 중 (국토부)

□ 2012~2014.9.30. 서울시와 국토교통부간에 주고받은 공문(별첨제외)

○ 공문목록

연번	공문제목	공 문 대 호	일 시
1	서울시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 국가교통위원회 심의자료 반려 알림(국토부→시)	광역도시철도과-2651	’12.11.15
2	서울시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 관계부처 협의관련 의견송부(시→국토부)	교통정책과-24947	’12.11.21
3	위례신도시 광역교통개선대책 관련 철도노선 추가 검토요청(시→국토부)	교통정책과-26087	’12.12.06
4	위례신도시 광역교통개선대책 변경관련 추가의견요청(국토부→시)	신도시개발과-64	’13.1.14
5	위례신도시 광역교통개선대책 변경관련 의견조회 회신(시→국토부)	교통정책과-1479	’13.1.28
6	위례신도시 광역교통개선대책(위례신사선 노선) 결정 요청(시→국토부)	교통정책과-24488	’13.11.5
7	위례신도시 광역교통개선대책 추가검토 요청(시→국토부)	교통정책과-27138	’13.12.6
8	서울특별시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 승인요청 (시→국토부)	교통정책과-17312	’13.12.9
9	위례신도시 광역교통개선대책 추가검토 요청 회신 (국토부→시)	도시광역교통과-3244	’13.12.13
10	서울특별시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 보완요청 (국토부→시)	광역도시철도과-213	’14.1.28
11	위례신도시 광역교통개선대책 변경 확정 알림 (국토부→시)	신도시택지개발과-833	’14.5.13
12	서울특별시 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 수정제출 (시→국토부)	교통정책과-14630	’14.7.21
13	서울 10개년 도시철도 기본계획 변경(안) 검토의뢰 알림 (국토부→시)	광역도시철도과-2279	’14.9.2
14	지하철 건설현장 도로함몰 대비 안전점검 결과 제출 (시→국토부)	도시철도사업부-5376	’14.9.3

별첨 : 서울시와 국토교통부간 주고받은 공문 사본 1부.

□ 상기노선 관련 민간제안 현황

노선명	사 업 개 요		민간제안 현황
	사업규모	사업구간
우이 신설선	11.4km 정거장 10	여의도 ~서울대	- 제안업체 : ㈜우이트랜스 - 제안일시 : ’03.6.30 - 추진현황 : 공사 중
신림선	8.06km 정거장 11	여의도 ~서울대	- 제안업체 : ㈜남서울경전철 - 제안일시 : ’10.2.11 - 추진현황 : 협상 중
동북선	13.34km 정거장 15	왕십리역 ~상계역	- 제안업체 : 동북뉴타운신교통㈜ - 제안일시 : ’10.9.17 - 추진현황 : 협상 중
면목선	9.05km 정거장 12	청량리 ~신내동	- 제안업체 : ㈜청량리신내경전철 - 제안일시 : ’07.12.21 - 추진현황 : 교통수요예측 재조사 중
서부선	16.15km 정거장 16	새절역 ~서울대입구역	- 제안업체 : 서부경전철㈜ - 제안일시 : ’08.8.1 - 추진현황 : 변경제안 검토중
우이-신설 연장선	3.50km 정거장 3	우이동 ~방학역	민간제안 없음
목동선	10.87km 정거장 12	신월동 ~당산역	민간제안 없음
난곡선	4.13km 정거장 5	보라매공원 ~난향동	민간제안 없음
위례 신사선	14.83km 정거장 11	위례~신사	- 제안업체 : 삼성물산㈜ - 제안일시 : ’08.2.14 - 추진현황 : 변경제안 검토 중

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과) (경전철추진반)	담당사무관 담당사무관	노 병 춘 최 병 훈
	☎2133-2241 ☎772-7161	담당자 담당자	최 연 호 이 희 권
	작 성 일 : 2014. 10.

이곳에 본문을 입력하세요