투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	장충체육관 리모델링공사 전면책임감리용역 책임감리원
(경유)
제목	보도공사 관련 사항알림

1. 보도환경개선과-14331(2014.10.22.)호와 관련입니다.

2. 동절기 보도공사 품질관리를 위한 ‘보도공사 closing 11’을 시행하고 있는바, 보도공사는 2014.11.30.일 까지 완료해 주시고,

3. 부득이 공사완료가 어렵다고 판단되면 보도공사를 2015년 3월이후로 시행토록 일정을 조정(공기연장 검토)해 주시기 바랍니다.

붙 임 : 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임봉규		조경시설과장	신용우		방재시설부장	11/04 임춘근
협조자
시행	방재시설부-11160	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 서소문로 37 서울시청별관 2동2층	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/	lbg98909@seoul.go.kr	/	대시민공개