문서번호	공공디자인과-14703
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		경관사업팀장	공공디자인과장
이영욱		김충범	11/04 代안연수
협조
	주무관		강진호

2014년 경관사업 사업비 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

공공디자인과

2014년 경관사업 사업비 재배정 계획

2014년 소외․낙후지역 도시경관 개선사업과 관련 자체계획을 수립한 자치구의 사업성을 검토하고 사업비(설계비)를 재배정하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 경관법 제16조(경관사업의 대상 등), 경관조례 제14조(재정지원)

○ 문관관광디자인본부장 방침

- 2014년 도시경관 디자인 추진계획 (공공디자인과-1749,'14.2.11)

Ⅱ		사업개요

○ 사업위치

- 광진구 자양동 능동로 1길, 3길 주변

(청담대교 고가도로 하부)

○ 사업기간

- '14. 11~’15. 12('14. 11~'15. 2 : 설계, '15년 : 시공)

○ 사업규모

- 길이 700m, 면적 1,128㎡

○ 사업내용

- 보도경사 조정 및 보행환경 개선

- 고가 하부공간 색과 빛을 이용한 경관 개선

- 도로시설 및 안내표지판 등 정비

-  자전거 보관소 및 공공시설(의자 등 )설치

Ⅲ		검토의견

(단위: 천원)

사업명	요청 금액	검토 금액	배정내용	검토결과	비고
광진구 청담대교 고가도로 하부 경관개선사업	50,000	50,000	시․자치구 각 50% 매칭비율적용에 따라 금액산정	광진구 자양동에 위치한 청담대교 고가도로 하부는 구조물로 인하여 주변이 어둡고 보도가 경사져 한강시민공원을 이용하는 시민에게 불편을 주는 등 경관개선이 요구되는 지역임

Ⅳ		추진 경위

○'13.  7. 22 ~  9.  2 : 사업대상지 자치구 제안서 공모

○'13.  9.   9 ~   9. 13 : 1차 사업대상지 서류심사 및 현장확인

○'13. 11.   7 ~ 11.  8 : 2차 사업대상지 현장 방문심사(외부 전문가)

○'13.11. 12         : 사업대상지 선정(공모 17개소중 8개소)

○'13.11. ~ 12. : 설계비 본예산 확보

○'14. 3. 4 ~ 9. 15 : 자치구 예산 재배정(중구,관악,도봉,종로)

Ⅴ		사업비 재배정

(단위: 천원)

구 분	예산액	배정총액	금회배정액	기배정액				배정잔액
			광진구	종로구	중 구	관악구	도봉구
계	318,500	220,000	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	98,500
시책추진업무추진비 (100-203-03)	3,500	-	-	-	-		-	3,500
시설비 (100-401-01)	310,000	220,000	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	90,000
사무관리비 (100-201-1)	5,000	-	-	-	-		-	5,000

Ⅵ		향후일정

○ '14. 11 : 설계용역 발주 및 계약, 총괄기획(MP)선정

○ '14. 12 ~ '15. 1 : 설계용역 시행, 착수보고

○ '15. 1  : 주민협의체 구성, 중간보고

○ '15. 2 : 설계용역 준공

○ '15. 5 ~ '15. 12 : 공사시행

붙임 : 1) 위치도 및 사업개요 1부.

2) 광진구 예산배정요구 공문 1부.   끝.