투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	공동도급계약 출자비율 변경 요청(917공구)

1. GS건 917 2014-581(2014.11.04)호와 관련입니다.

2. 지하철9호선 2단계 917공구 건설공사와 관련 공동수급체 구성원인 벽산건설(주)이 공동도급자 지위를 포기하고 잔여공사에 대한 지분조정을 신청함에 따라 아래와 같이 잔여공사 출자비율을 조정하고자 하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 원)

공동수급자		전 체 분		기출자 (기성)	잔여시행분	비 고
		당초	변경
GS건설(주)	공사비	68,983,200,000	71,911,215,000	57,271,140,000	14,640,075,000
	출자비율(%)	60.00%	62.55%	60.00%	75.00%
㈜KCC건설	공사비	22,994,400,000	23.970.405.000	19,090,380,000	4,880,025,000
	출자비율(%)	20.00%	20.85%	20.00%	25.00%
벽산건설(주)	공사비	22,994,400,000	19.090.380.000	19,090,380,000	0
	출자비율(%)	20.00%	16.60%	20.00%	0.00%
계	공사비	114,972,000,000	114,972,000,000	95,451,900,000	19,520,100,000
	출자비율(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.

	도시철도토목부장
★주무관	엄상민		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	11/04 한동근
협조자	주무관	황왕연
시행	도시철도토목부-12025	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 남산별관 4층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개