문서번호	도로포장연구센터-550
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로포장연구센터장	품질시험소장
윤상열	이상염	11/05 권영찬

도로함몰 탐사장비 제작·구매 발주 계획

2014. 11

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로함몰 탐사장비 제조·구매 발주 계획

도로함몰 특별관리대책 일환으로 첨단 동공탐자장비 도입을 통한 기존의 발생후 조치에서 발생전 예방으로 전환, 사전 탐지활동 강화 및 탐사기법 도입에 따른 『도로함몰 탐사장비 제조·구매 발주계획』에 대한 보고임

Ⅰ		추진경위

○ ‘14.08.28 : 도로함몰 특별관리대책 발표

○ ‘14.10.01 : 도로함몰 특별관리대책 시행(행정2부시장 방침제285호)

○ ‘14.10.06 : 도로함몰관련 시장 요청사항 시달

- 지반탐사기술에 대한 민·산·관 협력체계 구축, 다양한 지반조사 방법 검토

○ ‘14.10.15 : 동공탐사 선진기술 운영실태 조사보고(시장보고)

- 국내 탐사기술 여건 고려 장비구매 물량 최소화(1대)하여 연구개발을 추진함과 동시에 용역을 통한 민간기술력 향상 병행 추진 당부

○ ‘14.10.28 : 도로함몰 탐사장비 구매예산 집행계획 수립(도로관리과-16327호)

Ⅱ		사업개요

○ 사업명 : 도로함몰 탐사장비 제조·구매

○ 기  간 : 착수일로부터 5개월

○ 제작·구매 장비     : 차량탑재형 GPR1대, 내시경 1대(시추기포함)

○ 소요예산(‘14년 추경) : 770백만원

○ 주요 제작사양

- 탐사심도 1~3m(평균심도 1.5m 내외), 일회주행으로 2.4m  차로폭 탐사

- 탐사속도 평균시속 45㎞/h 내외

- 탐사차량 개조 : 2.5톤 더블캡

⇒ GPR본체, 탐사제어 PC, CCTV 3대(전·후·측방), 안테나함 등 장착, 내시경 및 시추기 적재, 고해상도 영상취득 장지, GPS 및 운행거리 측정기 등 장착

- GPS 좌표 및 주변도로 CCTV 영상을 GPR 영상데이터 맵핑

Ⅲ		제조·구매 방법

○ 제작·구매 납품 제안서를 제출받아 『협상에 의한 계약체결 기준』에 의거 심사

○ 우선협상대상자를 선정하고 협상절차를 통하여 계약

제조·구매 의뢰 (연구센터→재무과)	⇒	입찰공고 (재무과)	⇒	제안서 심사 · 기술심사 : 연구센터 · 가격심사 : 재무과
기술심사 결과 통보 (연구센터→재무과)	⇒	협상대상자 선정 및 통보 (재무과→대상자)	⇒	협상 및 계약체결 (재무과)

Ⅲ		향후계획

○ ‘14.11.06 : 제안서 작성·검토 자문위원회 개최

○ ‘14.11.07 : 계약심사 및 일상감사 의뢰

○ ‘14.11.13 ~ 11.17 : 사전규격공개(긴급 3일 이상 - 의견수렴 등)

(나라장터, 서울시 및 품질시험소 홈페이지)

○ ‘14.11.18~11.28 : 제조·구매 계약의뢰(연구센터 → 재무과)

※ 긴급공고 의뢰(협상) – 10억미만 10일이상 이내

○ ‘14.11.24~11.28 : 입찰참가등록 및 제안서류 접수

○ ‘14.12.01~12.02 : 기술능력 평가(객관적 평가 : 20점)

○ ‘14.12.04      : 기술제안평가 위원회 기술능력평가

(주관적 평가 : 60점, 가격평가 : 20점)

○ ‘14.12.05       :  협상결과 통보(연구센터→재무과)

○ ‘14.12.08~      : 협상 및 계약체결.  끝.