의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-13183
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		건축총괄과장	건축부장	시설국장		결재
장충근		강성욱	김우성	11/05 이광세
협 조

제 목	시의회 행정사무감사 자료 제출(행정자치위원회)

2014. 11

도시기반시설본부

건     축     부

김경자 의원(행정자치위원회, 새정치민주연합)

11. IT-COMPLEX 건립 관련 시행자(감리자) 및 시공사 선정 경위

□ 시행자(감리자) 선정 경위

○ ’08.06.18 : IT-COMPLEX 건립 추진계획 수립(시장방침 제318호)

○ ’08.11.12 : 기술용역(감리) 타당성 심사 완료(기술심사담당관)

○ ’09.01.28 : IT-COMPLEX 건립공사 전면책임감리용역 시행계획 수립

- 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

- 낙찰자 결정 : 사업수행능력평가 및 가격입찰

○ ’09.02.04 : 전면책임감리용역 발주 시행

○ ’09.02.05 : 입찰 공고

○ ’09.03.06 ; 사업수행능력평가 실시

○ ’09.03.16 : 입찰(가격)

○ ’09.03.17 : 낙찰자 결정(건원엔지니어링 외 2개사)

○ ’09.03.30 : 감리용역 계약 및 착수

□ 시공사 선정 경위

○ ’08.06.18 : IT-COMPLEX 건립 추진계획 수립(시장방침 제318호)

○ ’08.07.18 : 대형공사 입찰방법심의 완료(기술심사담당관)

- 입찰방법 결정 : 설계․시공일괄입찰

○ ’08.08.28 : 입찰안내서 심의 완료(기술심사담당관)

○ ’08.09.19 : 공사발주 시행

○ ’08.10.06 : 입찰 공고(조달청)

○ ’09.01.14 : 입찰정정 공고(조달청-입찰일시 연기)

○ ’09.02.02 : 공사 입찰

○ ’09.02.27 ; 기본설계 적격심의 완료(기술심사담당관)

○ ’09.03.04 ; 실시설계 적격자(낙찰자) 선정(조달청-대림산업 컨소시엄)

○ ’09.04.03 : 우선시공분(Fast-Track) 계약 및 착공

○ ’09.11.11 ; 실시설계 적격심의 완료(기술심사담당관)

○ ’10.01.01 : 본 공사(2차분) 계약 및 착공.   끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	강성욱
	☎3708-2605	담 당 자	장충근
	작 성 일 : 2014. 11.