문서번호	시설과-7848
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김영수	김영백	11/05 함석주
협 조

『2014년 남산공원 남측순환로 정비공사』관련

예비준공검사 보고

2014. 11.

시  설  과

『2014년 남산공원 남측순환로 정비공사』

예비준공검사 보고

『2014년 남산공원 남측순환로 정비공사』시행과 관련하여 예비준공검사를 실시하고 결과를 보고드림

1		공사개요

공 사 명 : 2014년 남산공원 남측순환로 정비공사

공사개요 :

◯ 배수로 설치 1,000m, 아스팔트포장 1,250m

◯ 차선도색 753㎡, 도로부속시설물 설치 1식

공사기간 : 2014.06.25 ~ 2014.11.21

도 급 액 : 384,486,000원

도 급 자 : 정로건설(주)  대표 이 강 태

2		예비준공검사

검사일시 : 2014.11.03.(월)

검 사 자 : 시설과장, 시설팀장, 현장대리인(심우진)등 2인

검사대상 : 공정율 85%

○ 시설물 현장검측 및 시공내역 점검, 확인

○ 향후 잔여공정 추진일정 확인 및 보완사항등

검사결과(현장지시)

○ 배수로 그레이팅 유격최소화 및 곡선부 정밀시공(폭3~4cm이내)

○ 석축주변 초화류식재시 표면 피복철저

○ 표층시공시 배수구배가 완만하도록 정밀시공 지시

3		보고의견

상기와 같이 지시사항에 대하여 보완 및 잔여공사추진에 만전을 기하고 함.

『남산공원 남측순환로 정비공사』

공종별 시공현황

배수로 설치전	배수로(그레이팅) 설치후
배수로 설치전	배수로(그레이팅) 설치후
미끄럼방지 포장전(팔각진입로)	미끄럼방지 포장후(팔각진입로)

『남산공원 남측순환로 정비공사』

예비준공검사 사진

기존 아스팔트포장(CA) 깨기	기존 포장층 터파기
원지반층 다짐	보조기층 포설 및 다짐
보조기층 포설 및 다짐(층다짐)	중층포설 및 다짐