문서번호	토목부-21620
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	11/05 노우성
협조

전면책임감리용역(2차) 시행계획 보고

(신림~봉천터널 도로건설공사 1공구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

도시기반시설본부

(토목부)

전면책임감리용역(2차) 시행계획 보고

(신림~봉천터널 도로건설공사 1공구)

「신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(1공구) 전면책임감리용역」에 대한 총괄 계약의 준공기한이 도래함에 따라 시행계획을 검토 보고드림.

용역개요

○ 용 역 명 : 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 전면책임감리용역

○ 용역규모 : 폭 왕복 4차로, 연장 3.1Km

○ 용역기간 : ‘10. 1. 5. ~ ’14.11. 9.

○ 용 역 사 : ㈜동일기술공사 외1

○ 용역금액 : 4,422,000천원

보고내용

○ 「신림~봉천터널도로건설공사(1공구)」의 준공기한이 '17.12.31.로 되어 있어 전면책임감리용역의 준공기한도 연기가 필요함.

「 차수별 계약현황 」

구 분	용 역 금 액	용 역 기 간	비 고
총 괄	4,422,000,000원	'10. 1. 5. ~ '14.11. 9.	50개월
1 차	63,000,000원	'10. 1. 5. ~ '12. 4. 2.	기한경과
장 래	4,358,000,000원	-

○ 전면책임감리용역(1차)은 보상지연으로 공사가 중단됨에 따라 '12 4. 2. 이후 중단상태이며, 본 공사의 준공기한이 '17.12.31.로 연장되었으나 위 용역은  준공기한이 연기되지 않아 전면책임감리용역(2차) 발주가 필요함.

(단위 : 원)

구 분	용 역 비(원)	용 역 기 간	비 고
2 차	2,000,000	2014.11. 5. ~ 2014.11. 9.

시행 계획

○ 위 보고내용과 같이 「신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)」전면책임감리용역(2차)을 발주하여, 본 공사의 준공기한(‘17.12.31.)까지 전면책임감리용역(총괄, 2차분)의 준공기한을 연기하여 업무수행에 만전을 기하고자 함.

「총괄 및 2차 감리용역 설계변경 내역」

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총괄	용 역 비	4,422,000,000	4,422,000,000	-
	용역기간	'10. 1. 5. ~ '14.11. 9.	'10. 1. 5. ~ '17.12.31.	증 37개월
2차	용 역 비	2,000,000	2,000,000	-
	용역기간	'14.11. 5. ~ '14.11. 9.	'14.11. 5. ~ '17.12.31.	증 37개월

붙  임 : 감리용역(2차) 설계내역서(신봉 1공구) 1부.  끝.