문서번호	설비부-12391
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		이흥복	11/06 박기형
협조

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액조정 검토보고(제7회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액조정 검토보고(제7회)

「동부간선도로확장 전기공사(3공구)」시행중 감리단에서 물가변동으로 인한 계약금액조정신청(제7회)이 있어 검토하고 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 동삼감 제2014-161(2014.09.26.) : 물가변동(제7회)관련 계약금액 조정보고

□ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 같은법 시행규칙 제72조

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구) 전기공사

□ 공사규모 : 지하차도(상도,장암) 전기설비 1식, 가로등주 125본

□ 공사기간 : 2008. 06. 26 ～ 2015. 12. 31

□ 도 급 액 : 2,675백만원(도급비 1,607, 관급비 1,052, 이전비16)

□ 시 공 사 : ㈜정등전력 대표 김병갑

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

Ⅲ. 적정성 검토

□ 조정요건 충족여부

구분	기준시점	비교시점	경과일수	지수조정율(%)	검토결과
7회	2011.09.30	2014.09.01	1,067	4.02	요건충족

※ 충족요건 : 계약일로부터 90일이 경과되고 지수조정률이 100분의 3이상 증가

□ 물가변동 조정내용

구 분		금 액	비 고
① 물가변동 대상금액(B)		1,607,456,000원
② 계약공정적용	제외공정	28.44%	457,214,600원
	기성공정	27.76%	446,274,000원
③ 물가변동 적용제외금액(C)		457,214,600원
④ 물가변동 적용대가(D)		1,150,241,400원	(B-C)
⑤ 물가변동 조정율(A)		4.02%
⑥ 물가변동 등락대상 조정금액(G)		46,239,000원	(A×D)
⑦ 선금급 금액		-
⑧ 선금급 공제금액(F)		-	(D×A×E)
⑨ 물가변동 조정 적용금액		46,239,000원	(G-F)

※ 물가변동 적용제외금액 선정 : 예정공정율, 실행공정율 중 높은 공정율적용

□ 공사비 조정내용

구분	회차	계약금액	물가변동증액	조정금액	비고
도급비	7회	1,607,456,000	46,239,000	1,653,695,000

□ 감리단 검토의견

∙물가변동으로 인한 계약금액 조정보고서의 내용을 검토한 결과 관련 처리규정에 적합함

Ⅳ. 조치의견

본 공사의 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 관련규정에 따른 조정요건 및 조정금액산출이 적정한 것으로 판단되어 감리단에 승인통보하고 증액이 3000만원 이상이므로 향후 설계변경 심의를 개최하여 결과를 계약변경시 반영코자 합니다.

따로붙임  1. 물가변동 계약금액 조정 감리단 검토의견  1부.

2. 물가변동 내역서  1부.

3. 참고자료(조달청 ES관련 질의응답집)  1부.     끝.