투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	내곡IC교외 3개소 정밀점검용역 설계변경(정산) 계약의뢰

1. 교량보수과-4221(2014.11.05)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 내곡IC교외 3개소 정밀점검용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 내곡IC교외 3개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2014.06.17 ~ 2014. 11. 13

다. 계 약 자 : 천담개발(주)  대표 김 상 문

라. 예산과목

- 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리.도로시설물운영,시설물안전

점검 및 진단,시설비

마. 변경내역

구 분		금 액		증감
		당 초	변 경
총용역비		65,107,800	64,680,000	감427,800
도급비	공급가액	59,188,909	58,800,000	감388,909
	부가가치세	5,918,891	5,880,000	감38,891
	계	65,107,800	64,680,000	감427,800

바. 변경사유 : 자문위원회 개최에 따른 자문비 정산(5인→3인)

따로붙임 : 1. 설계변경 방침서1부.

2. 변경내역서 1부.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	조장호		교량보수과장	11/06 김환겸
협조자
시행	교량보수과-4225	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동2번지)	/
전화	02-2040-0383	/전송	02-2040-0308	/		/	대시민공개