투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	9호선 2,3단계 `14년도 공구별 예산배정 변경(재조정) 요청

1. 도시철도설비부-10008(2014.11.4)호 및 도시철도토목부-505(2014.1.15)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『9호선 2, 3단계 `14년도 공구별 예산배정 계획』에 의거 배정된 9호선 2,3단계 시스템분야 `14년도 예산배정액에 대하여 아래와 같이 변경(재조정) 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용                                                (단위 : 백만원)

구 분	공 구 명	`14년 예산배정			비 고
		당 초	변 경	증 감
9호선 2단계	토목분야	43,746	44,703	증 957	시설비
	시스템분야	15,000	14,043	감 957
9호선 2단계	토목분야	208,901	210,901	증 2,000	시설비
	시스템분야	9,700	7,700	감 2,000

나. 변경사유 : 시스템분야 예산집행 잔액(2단계), 총사업비 조정 지연에 따른 시스템분야로 배정된 예산불용 방지(3단계)

따로붙임 1) 관련 방침서 및 시스템분야 예산배정 변경내역  1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	전계목		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	11/07 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-10165	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울특별시 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	(02)772-7272	/전송	(02)772-7308	/	jkmok@seoul.go.kr	/	대시민공개