문서번호	도로보수과-10029
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	11/07 김만수
협조
	주무관		이상하

2014년 중앙버스전용차로(서울역환승센터)

기능개선사업 시행 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
교통운영과-20460				125,000천원

2014.  11. 06(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 중앙버스전용차로(서울역환승센터)

기능개선사업 시행 계획 보고

서울역환승센터 유지관리 실태 점검결과 시각장애인용 점자블럭의 도색부분이 박락되는 등 시민 불편 및 도시미관을 저해하고 있어 환승센터 내 시각장애인용 점자블럭을 교체하고자함.

☞ 관련근거 : 교통운영과-20460(2014.10.31.)호와 관련임.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 중앙버스전용차로 기능개선 사업

○ 위    치 : 중구 한강대로 서울역 환승센터

○ 개선내용 : 시각장애인용 안전유도블럭(점형, 선형) 교체

○ 예산배정 : 125,000,000원

□ 보고내용

○ 2014년 중앙버스전용차로 기능개선사업(서울역환승센터) 건에 대하여 교통안전부속물 유지보수공사 시행

- 안전유도블럭(점형, 300×300×60mm) : 2,066개

- 안전유도블럭(선형, 300×300×60mm) : 1,918개

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지의 계약기간 소요 및 동절기 이전에 공사를 완료하여야 하므로 별도 발주시행은 곤란하여  『2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사』에 포함하여 시행하고 추후 정산 설계변경 시행.

- 필요금액 : 약 125,000,000원

○ 관급자재 사용 검토

- 교통안전부속물 유지보수공사에 사용될 관급자재(안전유도블럭)은 조달청에 계약 의뢰하여 구매.

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	교통안전부속물 유지보수		집행잔액
		도급비	관급비
중앙버스전용차로 기능개선사업	125,000	101,770	23,230	0

□ 향후계획

○ 2014. 11. 10 : 관급자재 구매 의뢰

○ 2014. 11. 11 : 유지보수공사 작업지시

○ 2014. 12. 20 : 기능개선공사 완료

○ 2014. 12. 22 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과 보고

붙 임 : 1. 2014년 교통안전부속물 유지보수공사 설계내역서 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.