문서번호	시설과-6633
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	시설안전부장
이용구	김인규	11/07 이규상
협 조

강북정수장 고도정수처리시설공사

고도정수처리시설 주변 잔디식재 실정보고

2014. 11. 7.

시 설 안 전 부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

강북정수장 고도정수처리시설공사

고도정수처리시설 주변 잔디식재 실정보고

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2010.02.18 ~ 2014.10.31

○ 도 급 비 : 55,368,948,800원

○ 공사개요 : 고도정수처리시설 72만㎥/일

○ 시 공 자 : 대보건설㈜  대표 남관우

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링  대표 노진명 외 2개사

2. 보고요지

○ 강북아리수정수센터에서 고도정수처리시설 주변에 대한 잔디식재 요청(강북 행정관리과-7527(2011.11.3)이 있어 검토 보고 함.

※ 소요공사비 : 34.496천원

3. 보고내용

○ 강북아리수정수센터에서 고도정수처리시설 외곽부지인 울타리(Y형휀스) 주변 등에 잔디식재 요청이 있어 검토한 바, 우천시 토사 유실 및 미관상으로 좋지않아 잔디를 식재(줄떼)하여 정수장 이미지 개선이 필요한 실정임.

고도정수처리시설 측면(동쪽)		고도정수처리시설 후면(북쪽)

4. 공사비 증, 감 현황

(단위 : 천원)

구 분	단위	수 량 증 감 대 비			공 사 비
		당 초	변 경	증,감)	당 초	변 경	증,감
잔디식재(줄떼)	㎥	-	7,106	7,106	-	25,596	25,596
직접공사비						25,596	25,596
간접비						5,764	5,764
소 계						31,360	31,360
부가가치세						3,136	3,136
도급비						34,496	34,496

5. 책임사업관리자 조치의견

○ 상기 검토내용과 같이 변경이 필요할 것으로 판단되므로 시공사 실정보고 내용과 같이 시공하고 추후 설계변경 시 반영함이 타당하다고 사료 됩니다.

6. 설계변경 근거

○ 『지방자치단체공사계약일반조건』 Ⅵ. 공사 설계의 변경  1. 설계변경 가. 설계변경은 다음각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 3. 현장상태에 따른 설계변경 가.  5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경 등

7. 조치의견

○ 상기 책임사업관리자 검토사항이 타당하므로 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공토록 조치코자 하며, 변경사항은 추후 계약금액조정 검토를 받아 설계변경시 반영코자 합니다.

붙임： 현장실정 보고(강북(감)2014-642) 1부.   끝.