문서번호	방재시설부-11376
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		김흥근	11/07 임춘근
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

실정보고(지정폐기물 처리건) 검토 보고

2014. 11.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

실정보고(지정폐기물 처리건) 검토 보고

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」중 공원내 녹지구간에서 유류탱크로 추정되는 지하구조물이 발견되어 폐기물 제거 및 정화처리에 대한 실정보고가 접수되어 이에 대한 검토 보고임.

[근거:잠원2감 2014-272호(′14.11.06)]

□ 공사개요

◦ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

◦ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, L=220m(2.0×1.5@1)

◦ 공사기간 : '12. 12. 21 ~ '14. 11. 30

◦ 총사업비 : 11,000백만원

◦ 현공정율 : 98.8%

□ 추진경위

◦ 2014. 07. 10 : 수목 식재를 위한 터파기 중 지하구조물 발견

◦ 2014. 07. 25 : 실정보고(감리→도기본)

◦ 2014. 09. 02 : 지하매설물 처리 요청(도기본→서초구청)

◦ 2014. 09. 12 : 지하매설물 처리관련 검토회신(서초구청→도기본)

․ 공사중 발생 폐기물에 대하여 사업시행청에서 처리

◦ 2014. 09. 19 : 오염도측정  협조요청(도기본→서초구청)

◦ 2014. 09. 26 : 오염물질 적정처리 협조 요청(도기본→서초구청)

․ 탱크내부 액상은 지정폐기물로 처리

․ 탱크 외부 토사는 서울시 보건환경연구원에 토양오염도 검사 의뢰

※ 관련규정 : 폐기물관리법 시행령 제3조 별표1 (지정폐기물위 종류)

․ 6. 폐유(기름성분을 5퍼센트 함유한 것을 포함)

◦ 2014. 10. 15 : 오염물질 처리결과 알림(서초구청→도기본)

․ 유류탱크내 액상은 폐유가 포함되어 지정폐기물처리업체에 위탁처리

․ 탱크 주변의 토양오염도 검사 결과 토양오염우려 기준이내

◦ 2014. 11. 03 : 실정보고(지정폐기물 처리건)(감리→도기본)

․ 지정폐기물 120톤(액상 10톤, 고상 110톤), 폐콘크리트 154톤 처리

․ 처리비용 : 65백만원(지정폐기물 처리 57,035천원, 콘크리트 처리 7,965천원)

□ 폐기물 현황

- 용허리공원 저류조 공사 구간내 지하에서 유류탱크로 추정되는 구조물이 발견되어

- 서초구청에 지하 폐기물에 대한 오염도 검사를 의뢰 한 결과

․ 탱크내부 폐기물(액상 10톤, 고상 110톤)은 지정폐기물로,

․ 탱크외부 토사는 토양오염도 검사결과 토양오염우려 기준이내로 판명 됨.

․ 현황사진

유류탱크 상부 전경	유류탱크 2기 확인

□  감리단 검토의견

◦ 공사 구간내 지하에 매설된 유류탱크는 수목의 생육환경 저해 및 토양오염  방지를 위하여 오염원 제거가 요구되어, 관련 규정에 적합한 업체로 하여금 처리함이 타당하며, 폐기물 처리 수량은 추후 정산 반영코자 함.

◦ 적용 단가 : 견적가격(지정폐기물) 및 계약단가(폐콘크리트) 적용

◦ 소요 예산 : 증) 65,000천원

- 지정폐기물 처리 증)57,035천원 , 폐콘크리트 처리 증)7,965천원

□  조치의견

◦ 감리단 실정보고 내용과 같이 저류조내 지하매설물을 적법한 자격을 갖춘 처리        업체로하여금 처리토록 함이 타당한 것으로 판단되며,

◦ 계약심사과 ‘계약심사’ 또는 “본부 설계변경소심의” 결과를 반영하여 추후        설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 감리실정보고서 1부.   끝.