문서번호	도로보수과-6507
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이문희	박일연	손수희	11/07 송상영
협 조

봉은사로 포장도로 일제정비계획 검토보고

2014. 10.

동부도로사업소

[도로보수과]

봉은사로 포장도로 일제정비계획 검토보고

봉은사로 구간의 지하철 9호선 2단계 공사가 2008. 6월 착공하여 2014. 12월 완료 예정이며, 동구간에 강남구청 치수과에서 시행한 수해예방사업(하수암거부설)이 준공 예정으로 있어, 우리 사업소에서 관리하는 봉은사로에 대하여 일제 포장도로 정비계획을 수립하여 쾌적한 도로환경을 시민들에게 제공코자 함.

Ⅰ		봉은사로 현황

○ 규모 : 면적 686a (폭 21m, 연장 3,270m)

○ 구간 : 교보타워사거리(신논현역) ~ 봉은교교차로

Ⅱ		추 진 경 위

○ 지하철공사 협의

- 2008. 6월  : 지하철9호선 2단계 공사 착공(도시기반시설본부)

- 2013.07.17. : 지하철9호선 2단계 도로복구 계획 통보(도기본→동부)

- 2013.10.24. : 지하철9호선 2단계 도로복구 협의 회신(동부→도기본)

- 2014.09.29. : 지하철9호선 2단계 도로복구 협조요청(동부→도기본)

‣ 공사장 및 공사장 주변 포장침하, 균열, 소성변형 등 포장 불량구간 추가로 포장요청

- 2014.10.06. : 지하철9호선 2단계 도로복구 합동점검

‣ 도로사업소, 시공사, 감리단 현장 도로 합동정검 협의 시행(포장복구 구간 조정 시행)

- 2014.10.31. ~11.3. : 3차 합동회의

○ 하수도공사 협의

- 2013.03.25. : 봉은사로 사각형거 신설공사 착공(강남구)

- 2014.07.22. : 사각형거 신설공사 도로 포장 협의(강남구→동부)

- 2014.08.12. : 사각형거 신설공사 도로 포장 협의 회신(동부→강남구)

- 2014.08.20. : 사각형거 신설공사 도로포장 재협의(강남구→동부)

- 2014.09.22. : 사각형거 신설공사 도로포장 재협의 회신(동부→강남구)

- 2014.10.31. ~11.3. : 3차 합동회의

Ⅲ		포장도로 정비 기본방향

○ 지하철공사 및 하수암거공사로 인한 포장도로 훼손 구간까지 원인자 복구 시행

○ 단순 노후된 포장도로는 우리 사업소에서 병행 정비

Ⅳ		포장도로 복구계획

○ 지하철공사 복구 : 봉은사로 구간 8개소(정거장, 환기구 등)에 대하여 포장복구 시행(공사 영향범위 포함)

- 복구면적 : 295a (915공구 144a,  916공구 151a)

- 복구시기 : 915공구(11.11.), 916공구(추후시행)

○ 강남구청 복구 : 하수암거 부설구간 중 지하철공사 복구구간을 제외한 5개소에 대하여 포장복구 시행

- 복구면적 : 117a

- 복구시기 : ‘14.11 중(사업소 포장복구 완료후 시행)

○ 사업소 복구 : 봉은사로 구간 중 기 정비한 104a를 제외한 7개소에 대하여 우리 사업소에서 지하철 개통에 사전대비 포장복구 시행

- 복구면적 : 171a (노후포장도로 정비)

- 복구시기 : ‘14.11.9 ~ 11.10.

Ⅳ		행 정 사 항

○ 그간 지하철공사현장 및 강남구청과 협의한 사항을 도면화하여 통보하고 긴밀한 협조체계 유지

○ 노후포장도로 정비공사 예산은 하반기 추가 재배정된 예산 820백만원 중 330백만원 활용

○ 공사의 시급성을 감안 노후포장도로 정비공사에 포함 시행하며 포장 공사에 연관된 폐아스콘처리용역, 노면표시용역, 관급자재 등 물량 변경(변경설계) 시행

붙 임  : 봉은사로 포장계획 평면도 1부.  끝.