문서번호	도시철도설비부-10155
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
남궁영주		서태창	11/07 정찬웅
협조

- 지하철 9호선 915공구 정거장 전기공사 관련 -

정거장내 수익시설 확충에 따른 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 9호선 915공구 정거장 전기공사 관련 -

정거장내 수익시설 확충에 따른 실정보고 검토보고

지하철 915공구 정거장내 대합실 여유 공간에 대한 임대상가 등 수익시설 확충에 따른 추가 공사를 검토 보고 드림.

Ⅰ		사업 개요

대지위치 : 9호선 2단계 915공구(926,927정거장)

규    모 : 정거장 2개소, 환기구 6개소

공사기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 12. 31

계약금액 : 3,725백만원(전기)

시 공 사 : 경남기업(주), 대원건설산업(주)

감 리 사 : (주)동일기술공사 외 4개사(전기 : 세종기술)

Ⅱ		근 거

동일(현) 제14-785(2014.10.23)호“915공구 정거장 수익시설 확추에 따른 실정보고”

도시철도설비부-2860(2014.03.28)호“지하철 정거장 수익시설 확충에 따른 업무지시”

Ⅲ		실정보고 내용

915공구(926정거장) 지하1층 대합실 수익상가 1개소(20[㎡]) 설치

공사비 증감내용

구 분	변경전	변경후	증 감	비 고
지하1층 대합실 수익시설 설치	-	8,129,000	8,129,000

책임감리단 의견

- 정거장내 수익시설 설치에 대한 설계서 검토 결과 적합함.

Ⅳ		검토 결과

926 정거장 대합실 여유공간에 임대상가 조성을 위한 전기설비 추가공사 설계서를  검토한 바, 전선관에 대한 단가를 조정하도록 조건부로 승인 ․ 통보하여 공사 시행에  지장이 없도록 조치하고

추후 설계변경전 전선관 단가 조정 및 물량 변경에 따른 실정보고 승인 후 정산처리하고자 함.

따로붙임 : 실정보고 승인 요청 문서 1부.  끝.