문서번호	도시철도설비부-10184
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
김기중	황영일	11/07 정찬웅

9호선 2단계 건설구간 시운전 상황보고 (2014.11. 6.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 일일 시운전 상황 보고

2014.11.6.(목)

□ 금일실적

급 전	단 전	시 험 시 간
10 : 07	15 : 01	10 : 30 ~ 16 :00

○ 시험내용

< 전 편성 자동운전시험 : 926편성 >

- 자동운전 시험 결과

시험항목	시 험 결 과		비고
	TC1	TC2
FA모드 운행 (일반열차)	양 호	양 호
FA모드 운행 (급행열차)	양 호	양 호
AUTO모드 운행 (일반열차)	양 호	양 호
AUTO모드 운행 (급행열차)	양 호	양 호
정위치 정차	양 호	양 호
	100%	100%

- 정위치 정차

역 명	상 행	하 행	비 고	역 명	상 행	하 행	비 고
926	·	-12		929	-32	-14
927	-15	-31		930	-20	-15
928	-18	-27

○ 참여인원:13명(본부 5명, 서울메트로 2명, 기관사 2명, 메인트란스 1명, 시공사 3명)

※ 상황실 근무 및 전수 시험자 : 이용기,황영일,안봉용,김기중,황영필

○ 전편성 자동운전시험 추진실적

- 시험대상 : 1단계 전동차 36편성(4량×36편성 = 144량)

- 시험기간 : 2014. 9. 17 ~ 12. 17(3개월)

- 시험실적 : 28편성(78%) 완료

·시험항목별 확인결과 이상차량 없음, 다만 정차위치가 허용 기준의

±35cm에 가까운 정거장 조정 필요(신호과 협조)

※ 935편성 : 927정거장 하행, -37cm

※ 936편성 : 927정거장 하행, -37cm

※ 918편성 : 929정거장 상행, -36cm

※ 923편성 : 929정거장 상행, -36cm

※ 924편성 : 929정거장 상행, -42cm

※ 925편성 : 929정거장 상행, -41cm

□ 본선 출입승인 : 없음

일자	분야	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고

□ 11. 7.(금) 시험계획

○ 차량 전 편성 자동운전 시험 계속

- FA모드 운행(일반열차)

- FA모드 운행(급행열차)

- AUTO모드 운행(일반열차)

- AUTO모드 운행(급행열차)

- 정위치 정차위치 등.   끝.