문서번호	건축부-13291
결재일자	2014.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관		건축관리과장	건축부장
전재진		곽동호	전결 11/07 김우성
협조

『신림2 빗물펌프장 설치공사』

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

건  축  부

「신림2 빗물펌프장 설치공사」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「신림2 빗물펌프장 설치공사」와 관련 책임감리원[㈜도화엔지니어링]으로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-12862호(‘14.10.28) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정)내용 알림

○ 신림감 제2014-365호(‘14.10.31) : 설계변경소위원회 자문내용 조치결과 제출

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 앵커볼트 M32×950 규격이 물가정보지에 없으면 견적서 첨부 등 지적사항에 대한 조치결과 보고서가 책임감리원(주, 도화엔지니어링)으로부터 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 조치 내용 : 별첨

3		감리원 검토의견

○ 신림2 빗물펌프장 설치공사의 설계변경 자문회의 결정사항을 수용

- 앵커볼트의 단가적용을 실정보고시 보고된 기존규격 비례식으로 산출된 단가가 전문업체 견적서 단가보다 저렴하므로 기존규격 비례식으로 산출된 단가적용이 타당하며, 견적서 첨부함

- 철골공사 조립 일위대가 제출

4		처리의견

○ 책임감리원(주, 도화엔지니어링)의 검토의견과 같이 설계변경 자문(결정)결과 지적사항 조치이행 등 보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계변경토록 책임감리원(주, 도화엔지니어링)에게 통보하고자 함

첨부 설계변경자문 소위원회 자문 조치결과 보고(신림2 빗물펌프장) 서류 1부.  끝.