다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역(상수,당인,박미) 준공기한 연기 요청

우리과에서 추진하고 있는 “방재시설능력향상 기본 및 실시설계용역”에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 당초 계약내용

가. 계약명 : 방재시설능력향상기본및실시설계용역(상수,당인,박미)

나. 계약기간 : 2013.11.13. ～ 2014.11.12

다. 계약금액 : 금사억오천구백팔십삼만삼천원(금459,833,000원)

라. 계약업체 : 동부엔지니어링(주) + ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

2. 변경내용 : 계약기간 90일 연장

가. 준공기한 연기

- 당초 : 2013. 11. 12 ~ 2014. 11. 12

- 변경 : 2013. 11. 12 ~ 2015. 02. 12

나. 연기사유 : 빗물펌프장내 주민친화시설 설치에 대한 주민여론조사 및 설계내역

확인을 위한 현장조사 추가 시행에 따른 소요기간 확보

나. 계약금액 : 변경없음

3. 귀책소재 : 서울특별시

4. 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기방침서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	최년수		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	11/10 김용학
협조자
시행	하천관리과-17751	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3881	/전송	02-2133-1044	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	대시민공개