문서번호	시설보수과-4262
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	11/10 송상영
협 조
	주무관			김호규

위례지하보․차도 인수․인계 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

위례지하보․차도 인수․인계 검토보고

송파구에서 시행․완료한 『위례성길~성내천간 도로개설공사』가 완료됨에 따라 공사구간내 “위례지하보․차도”에 대하여 우리사업소에서 인수코자 검토한 결과를 보고하는 것임.

Ⅰ		시설물 현황

○ 공 사 명 : 위례성길~성내천간 도로개설공사

○ 시설물명 : 위례지하보․차도

○ 시설물 위치 : 송파구 오금동 104 ~ 마천동 5

○ 시설물 개요 : B=19.45m, L=49.43m, H=5.08m

○ 공사기간 : 2007. 3.13 ~ 2012. 5.31

○ 시행청 : 송파구청(도로과)

○ 시공사 : 유앤지건설(주) 대표 신영도

○ 감리사 : ㈜신명건설기술공사

○ 설계사 : ㈜청석엔지니어링

Ⅱ		인수인계내역

○ 위례지하보차도

- 형식 : 철근콘크리트 BOX

- 규 모 : B=19.45m, L=49.43m, H=5.08m

○ 부속시설물 : 충격흡수시설 1개소

Ⅲ		추진경위

○ 2012. 9.24 : 도로개설 완료에 따른 도로시설물 인수인계(송파구)

○ 2012.10. 9 : 시설물 인수인계 요청 회신(우리사업소)

※ 회신내용 : 오금동쪽 입구 전면 ‘위’자 아래 누수

차도(4개소) 및 보도(2개소) 누수 발생

마천동 보도옹벽 배수구 배수로 미설치

○ 2012.11.29 : 시설물(위례지하차도) 인수인계 요청 회신(우리사업소)

※ 회신내용 : 차도 및 자전거도로 물고임 발생

충격방지시설 비규격품→규정에 맞는 규격품 설치

○ 2013. 1.10 : 위례지하보차도 인수인계 관련 지적사항 조치결과 제출(송파구)

※ 회신내용 : 물고임 발생부분 측량결과 종․횡구배 이상없음

충격방지시설은 설계에 반영된 제품 설치하였음

○ 2013. 2.13 : 위례지하보차도 인수인계 관련 합동점검시 지적사항 조치결과 제출(송파구)

※ 회신내용 : 상부 누수구간 보수 후 면처리 완료

벽체 및 충격흡수시설 정비 완료

○ 2014. 6.25 : 위례지하보차도 인수인계 지적사항 완료 통보(송파구)

※ 회신내용 : 충격흡수시설(비규격품) 규격품으로 교체 설치완료

Ⅳ		검토의견

○ 당해 시설물은 2012. 5.31 준공되었으나 그동안 점검결과 지적사항으로 인한 보수조치 관계로 인수·인계가 지연되었으나 현재 보수조치 완료된 사항임.

○ “시설물의안전관리에관한특별법시행령” 제2조제1항 규정에 의거 법정외시설물(터널구간의 연장이 100m 미만)이며, 시도상에 설치된 시설물로써 우리사업소에서 인수하여 관리토록 하고, 주관부서인 도로시설과에 인수·인계 시설현황을 통보코자 함.

붙 임  1. 인수·인계목록 1부.

2. 인수·인계서 2부.

3. 준공도서(도면, CD)(별도) 1부.

4. 공사완료 공고문 1부.

5. 하자보수 보증서 3부.

6. 전경사진 4매. 끝.